투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	「서울창업허브 리모델링공사 건설사업관리용역」 변경계약 의뢰

우리 본부에서 시행중인 「서울창업허브 리모델링공사 건설사업관리용역(감독권한대행)」에 대하여 아래와 같이 변경계약(총차 및 1차)을 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 서울창업허브 리모델링공사 건설사업관리용역

나. 용역기간 : 2016. 3. 8. ~ 2017. 6. 7(1차 : 2016. 3. 8. ~ 2017. 1. 7)

다. 계약금액 : 1,225,800천원 (1차 : 713,100천원)

라. 계 약 자 : ㈜ITM 코퍼레이션 건축사사무소 외 1개사

마. 계약변경 내용

구 분		변 경 전	변 경 후	비 고
용역기간	총차	2016.03.08. ~ 2017.06.07	2016.03.08. ~ 2017.05.07.	(감)1개월
	1차	2016.03.08. ~ 2017.01.07.	2016.03.08. ~ 2017.01.07.	변경없음
계약금액	총차	1,225,800,000원	1,225,800,000원	변경없음
	1차	713,100,000원	802,480,000	(증)89,380,000원

바. 예산과목 : 일자리노동국 창업지원과, 일자리연계강화를 통한 서민경제 활력제고, 체계적창업시스템구축(특별회계), 서울창업허브조성, 감리비

붙임 : 1) 검토 보고서 1부.

2) 건설사업관리용역 변경계약 요청서(투입계획표 및 내역서변경 포함) 3부.

3) 합의각서 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	정호기		복지시설과장	조영수		건축부장	08/11 김진용
협조자
시행	건축부-10760	(		)	접수		(		)
우	04520	중구 청계천로 8 프리미어플레이스 빌딩 13층 건축부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2652	/전송	02-3708-2659	/	bluenight@seoul.go.kr	/	부분공개(7)