의원 요구 자료 제출

시 행	도로계획과-11502
결재일자	2016.8.12.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	수신자참조

주무관		민자사업팀장	도로계획과장	안전총괄관		결재
최송천		정회원	하종현	08/12 이택근
협 조

제 목	시의원 요구자료 제출(요구번호 1227번, 김춘수의원, 도시안전건설위원회)

따로붙임 :  시의원 요구자료 1부.  끝.

김춘수의원(도시안전건설위원회, 새누리당)

요구번호 : 1227번

내    용 : 제물포터널 관련 다음 자료

- 계획단계 ~ 현재까지 사업추진 경위

□ 제물포터널의 계획단계~현재까지 사업추진 경위를 다음과 같이 제출합니다.

- '07.07.27. : 민간제안서 제출

- '09.02.02. : 사업제안서 타당성조사 완료(KDI)

- '11.01.20. : 제3자 제안공고

- '13.10.04. : 도시계획시설(도로) 결정고시

- '13.11.15. : 민간투자사업심의위원회(기재부) 심의

- '14.1.~ 3. : 여의도 주민협의회 개최(5회)

- '14.4.~10. : 여의도 주민대표 면담(4회)

- '14.11.24. : 환경영향평가 공청회('14.12.05. 공청회 2차)

- '14. 5. 9. : 민간투자사업 실시협약 체결

- '15. 3.26. : 여의도 주민협의회 개최 (6차)

- '15. 5.22. : 여의도 주민협의회 개최 (7차)

- '15. 7.27. : 환경영향평가 협의 완료

- '15. 8.10. : 교통영향분석·개선대책 심의 완료

- '15. 9.17. : 실시계획승인

- '15.10.16. : 공사착공

- '16.6.~ 8. : 여의도 주민대표 면담(5회).  끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (도로계획과)	담당사무관	정 회 원
	☎2133-8072	주무관	최 송 천
	작 성 일 : 2016. 08. 11.