문서번호	교통운영과-3107
결재일자	2014.2.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교통시설팀장	교통운영과장
류근호		김종호	02/19 강진동
협조

- 2013년 교통안전시설 설치공사 -

감리용역 설계변경 보고

2014. 2.

도시교통본부

(교통운영과)

- 2013년 교통안전시설 설치공사 -

감리용역 설계변경 보고

2013년 교통안전시설 설치공사 감리용역(강북,강남) 관련 사업기간 및 감리원수 변동에 따른 설계변경(정산) 보고임.

용역 개요

용 역 명 : 교통안전시설 설치공사 감리용역(강북,강남)

계약기간 : ‘13.3.20 ~ ’14.2.28

지 역	업 체 명	대 표	계약금액(원)	비 고
강 북	㈜영호이앤씨	정숙영	107,390,000
강 남	㈜트래픽스	김희수	108,570,000

설계변경 내용

용역기간 조정 : 동절기 사업기간 단축에 따른 용역기간 조정

- 당 초 : ‘13.3.20 ~ ’14.2.28일

- 변 경 : ‘13.3.20 ~ ’14.2.25일

계약금액 변경 : 용역기간 및 감리원 투입인원 조정에 따른 금액 정산

- 강북지역

▪ 당  초 : 중급기술자 92일, 초급기술자 185일

▪ 변  경 : 중급기술자 78일, 초급기술자 155일

- 강남지역

▪ 당  초 : 중급기술자 92일, 초급기술자 185일

▪ 변  경 : 중급기술자 78일, 초급기술자 155일

설계변경 내역

(단위:원)

지 역	당 초	변 경	증 감	비 고
강 북	107,390,000	90,330,000	감)17,060,000
강 남	108,570,000	91,399,000	감)17,171,000

조치 계획

상기 사항에 대해 설계변경(정산)을 시행하고자 함.

따로붙임 : 교통안전시설 설치공사 감리용역(강북,강남) 설계변경 내역서 각 1부.  끝.