문서번호	역사도심관리과-1660
결재일자	2014.2.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도심관리팀장	역사도심관리과장
강천수		백인호	02/19 이정화
협조

설계변경 및 정산보고

('13/'14년 광화문광장 제설작업용역)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

도 시 계 획 국

(역사도심관리과)

설계변경 및 정산보고

(‘13/’14년 광화문광장 제설작업용역)

□ 용역개요

○ 용 역 명 : ‘13/’14년 광화문광장 제설작업용역

○ 위   치  : 광화문광장

○ 용역내용 : 인력 211인, 장비 20일 부대공 1식

○ 계약기간 : 2013.11.15 ~ 2014.2.28

○ 계 약 자 : 정우산업  대표 오광열

○ 계약금액 : 43,463,200원

□ 변경내역

○ 설계변경 사유

- ‘13/’14년 광화문광장 제설작업용역 예산이 ‘13년 예산으로 사고이월이 불가하여 제설작업에 실제 투입된 제설 인원과 장비사용을 설계변경(정산)하여 2월말까지 지출코자 함.

○ 설계물량 변경내역

구 분	단위	당 초	변 경	증·감	비고
1. 제설인력	인	211	77	감 134
2. 제설장비	일	20	2	감 18

○ 계약금액 변경내역

구 분	계약금액	변경금액	증․감
공급금액	39,512,000원	10,850,000원	- 28,662,000원
부 가 세	3,951,200원	1,085,000원	- 2,866,200원
총 용역비	43,463,200원	11,935,000원	- 31,528,200원

□ 조치계획

○ 위 보고내용과 같이 설계변경(정산) 금액으로 재 계약하여 2월말까지 준공금액을 지급

○ 3월 이후 강설로 인한 추가 제설비용 발생시 ‘13년 예산을 사용하여 제설 또는 자체 제설작업

붙임 : 1. 변경 내역서 1부.

2. 제설작업 투입현황 1부.     끝.