투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신	서울특별시도시기반시설본부장(방재시설부장)
(경유)
제목	교통안전시설물 설치 원인자공사 변경승인 알림 [도림천상류 관악산 저류조 설치공사 중 교통안전시설물 설치공사(신호)]

1. 도시기반시설본부 토목부-12406(2016.08.05)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 “도림천상류 관악산저류조 설치공사중교통안전시설물 설치” 원인자공사 변경요청 사항에 대하여 아래와 같이 변경승인하오니 관련규정 및 지침등에 따라 공사시행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 도림천상류 관악산저류조 설치공사 중 교통안전시설물 설치 공사(신호, 표지)

나. 공사기간 : 2012.12.12 ~ 2017.5.30.

다. 원 인 자 : 도시기반시설본부(방재시설부)

라. 변경사항 : 차량지주 위치변경에 따른 물량 및 도면 변경

마. 변경사유 : 강남순환도시고속도로 관악IC 공사의 진행 및 준공에 따른 서울경찰청 교통처리계획 변경(교통관리과-15846<2016.  6.9.>)으로 차량지주 위치변경에 따른 물량,도면 등 변경

바. 승인사항

- 변경요청 사항과 같이 승인하오며, 서울경찰청 변경계획 및 교통관련 관계규정 등을 준수하여 공사를 진행하여 안전사고 예방 및 원활한 교통소통이 이루워질 수 있도록 바람.  끝.

	서울특별시 남부도로사업소장
주무관	김용문		기전과장	08/12 유재옥
협조자
시행	기전과-4250	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송	02)3284-5470	/		/	대시민공개