투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경(공기연장) 시행 - 2013년 교통사고 잦은 곳 개선 교통신호기 공사(2차)-강서

「2013년 교통사고 잦은 곳 개선 교통신호기 공사(2차)-강서」에 대하여 아래와 같이 설계변경(공기연장)을 시행하고자 합니다.

1. 공 사 명 : 2013년 교통사고 잦은 곳 개선 교통신호기 공사(2차)-강서

2. 공사기간

- 당초 : 2013.12.06 ~ 2014.02.28

- 변경 : 2013.12.06 ~ 2014.05.24 (공기연장)

3. 도 급 자 : ㈜에이텍파워 대표자 이고운

4. 설계변경내역 (변경없음)

(단위:원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비고
총공사비	111,350,300	111,350,300	-	변경 없음
도 급 비	101,889,800	101,889,800	-
이 설 비	9,460,500	9,460,500	-

5. 설계변경 사유 : 본 공사는 교통신호기 시설물을 개선(이설 및 신설)하는 공사로                               유관기관(영등포구청 교통행정과)의 토목공사와 공사공정 예정                               계획이 서로 맞지 아니하여 공사기간을 조정하여 공사를 원활히                               추진코자 하기 위함.

6. 예산과목 : 도시교통본부(교통운영과), 도시교통체계 및 소통 개선, 교통소통 및                            안전관리 강화, 교통사고 잦은 곳 개선, 시설비 및 부대비, 시설비.

붙임 : 1. 방침서 1부.

2. 감리기술검토의견서 1부.

3. 계약내역서(당초) 1부.

4. 준공기한 연기의뢰서 1부.  끝.

★주무관	양상규		기전과장	박재경		강서도로사업소장	02/19 이규상
협조자	주무관	한영호		주무관	윤신식		계약1팀장	김점선
시행	기전과-1905	(		)	접수		(		)
우	157-210	서울 강서구 양천로237(마곡동 67-1)	/
전화	2657-7969	/전송	2657-7939	/	ysg007@seoul.go.kr	/	대시민공개