문서번호	설비부-12808
결재일자	2016.8.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		환경설비과장	설비부장
지장환		여인웅	08/12 代유병기
협 조

『겸재교 건설 및 연결도로 확장 전기공사』

실정보고 내용 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 08.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『겸재교 건설 및 연결도로 확장 전기공사』

실정보고 내용 검토 보고

본 전기공사 진행 중 책임감리단으로부터 산책로 진입로 보안등 설치외 4건에 대한 실정보고 사항이 있어 아래와 같이 검토 보고 드림.

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명  : 겸재교 건설 및 연결도로 확장 전기공사

□ 공사위치  : 서울시 동대문구 휘경동(한천로) ～ 중랑구 면목동(동2로)

□ 공사규모 : 본교량(B 20m, L235m), 접속교량(B 15m, L 160m), 도로확장(L 750m)

□ 공사기간 : 총차 ‘10.02.05.～‘16.12.31.(6차 ‘16.01.18.～‘16.12.31)

□ 도 급 비 : 총차 금693,962,000원(6차 금68,785,000원)

Ⅱ		변경내용

□ 관련 근거

□ 시설관리공단 도로시설처-2751(2016.3.14.) : 동부간선도로 가로등 이설 요청

□ 동대문구치수과-6940(2016.05.30.) : 산책로 진입계단 조명설치 요청

□ 겸재교건설책임감리단업무지시(2015.12.22.) : 경관조명 철거 및 재설치 요청

□ 변경발생 내용

□ 토목구조물 변경(동대문구 구간 램프 추가)으로 인한 교량보도 경관조명 및 분전함 이설

□ 교량구조물과 저촉되는 동부간선로 가로등 1본 이설(기존 가로등 철거 후 신설)

□ 산책로 이전에 따른 진입계단 보안등 1본 설치 요청

□ 보도육교 및 엘리베이터 설치에 따른 배관·배선 변경 및 가로등 브라켓 설치

- 가로등 설치를 위한 기초용 브라켓(앙카용접 불가)을 제작하여 가로등 설치.

□ 개구부(교량 점검구)커버 설치

□ 세부변경내용

공 종	규 격	단위	수 량		비 고
			당초	변경
1. 경관조명 철거 후 재설치
외함기초	800*400*400	개소	-	1
RACE WAY	40*40	M	-	20
조명기구 TYPE"A"	LINE LED 72소자 18W	EA	-	3
케이블	F-CV 6mm2/2C	M	-	80
케이블	F-GV 6mm2	M	-	40
전선관	HI-PVC 28C	M	-	20
전선관	HI-PVC 36C	M	-	40
PULL BOX	100*100*50	EA	-	2
2. 동부간선로 가로등 이설
가로등주 설치	12M	개소	-	1
가로등주 철거	12M	M	-	1
등기구	세종로대형	EA	-	1
안정기	고효율	개소	-	1
램프	고효율	개소	-	1
가로등 기초	500*1000*1100	개소	-	1
케이블	F-CV 4mm2/2C	M	-	6
케이블	F-GV 6mm2	M	-	20
접지봉	14Ø1000	EA	-	1
3. 산책로 조명설치 및 보도육교 브라켓트 제작
가로등 기초 브라켓	동대문구/중랑구	식	-	1
가로등주 설치	5m	본	-	1
가로등주	5m	본	-	1
가로등 기초	경사로(3m/5m)	개소	-	1
4. 보도육교 및 엘리베이터 전선관 변경
폴리에틸렌 전선관	PE36mm	M	-	-133
강제전선관	ST 36C	M	-	74
후렉시볼	고장력 36C	M	-	58
풀박스	150*150*100	EA	-	8
풀박스	200*200*100	EA	-	2
5. 개구부(점검구)커버설치
개구부 커버설치	1000*1200	EA	-	3

□ 공사비 변경 내용

구 분	당초금액	변경금액	증 · 감	비 고
교량보도 경관조명 철거 재설치	-	2,800,638	2,800,638
동부간선로 가로등 이설	-	1,347,343	1,347,343
산책로 보행등 및 보도육교 브라켓트 제작	-	2,186,853	2,186,853
보도육교 및 엘리베이터 전선관 변경	-	3,278,278	3,278,278
개구부(점검구)커버설치	-	1,462,128	1,462,128
제 경 비	-	6,444,760	6,444,,760
합 계		17,520,000	17,520,000

□ 감리단 검토 의견

□ 위 검토 내용대로 승인 후 시공완료하여 향후 설계변경시 반영코자 함

Ⅲ		보고자 조치의견

□ 본 실정보고 사항에 대한 책임감리단의 검토 보고가 적합하다고 판단되므로 실정보고 사항을 승인하고, 향후 설계 변경시 계약금액에 반영될 수 있도록 책임감리단에게 통보하고자 함.

붙임  1. 감리단 공문 및 검토의견서 각 1부.

2. 실정보고 집계표 1부.

3. 시공사 공문 및 실정보고 관련 자료 각 1부. 끝.