문서번호	시설과-5490
결재일자	2016.8.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	추진반장	관리부장	서울대공원장
김용주	이승우	홍순길	08/16 송천헌
협 조
	동물원장		代어경연
	동물기획과장		代강경숙
	시설과장		공헌구
	조경과장		강인호
	동물복지2과장		代이재황

해양관 리모델링

기본 및 실시설계용역 보고 계획

2016. 8

(기반시설안전추진반)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

해양관 리모델링

기본 및 실시설계용역 보고 계획

해양관 리모델링 설계용역에 대한 기본설계 완료보고 및 보수ㆍ보강공사 설계용역에 대한 중간보고를 시행하고자 함

Ⅰ		공 사 개 요

□ 규    모 : 지하2층/지상1층, 연면적 7,166.11㎡, 외부방사장 1,876.08㎡

□ 공 사 비

◯ 리모델링 공사 : 34,700백만원

◯ 보수·보강공사 :  2,642백만원

Ⅱ		용 역 개 요

□ 용 역 명 : 해양관 리모델링 기본 및 실시설계용역

□ 계 약 자 : 앤드건축사사무소 대표 김중근외 1

□ 계약금액 : 660,624,000원

□ 설계기간 : 2015. 12. 28 ∼ 2016. 9. 2

Ⅲ		추 진 사 항

□ 2015. 12. 17 : 설계용역 당선작품 설명회

□ 2015. 12. 23 : 설계용역 계약

□ 2015. 12. 28 : 설계용역 착수

□ 2016. 02. 15 : 해양관 리모델링 추진방향 검토회의(돌고래 자연감소 이후 리모델링 시행)

□ 2016. 04. 01 : 해양관 리모델링 외부전문가 자문회의 개최

- 건축계획 및 전시 2인, 동물전문가 4인

□ 2016. 05. 17 : 총괄건축가 자문(도시공간개선단 : 별도 의견 없었음)

□ 2016. 06. 23 : 해양관 보수·보강공사 시행계획 및 준공기한 연기

- 준공기한 : 2016. 6. 24. → 2016. 9. 2.

□ 2016. 07. 15 : 설계용역비 변경계약(실시설계제외, 보수·보강공사 추가)

- 1,125,200천원 → 660,624천원(감464,576천원)

Ⅳ		보고회 계획

□ 일     시 : 2016.  8. 17(수)  14:00

□ 장     소 : 상상모둠실

□ 보 고 자

◯ 해양관 리모델링 기본설계

- 아뜰리에 리옹서울 대표 이소진 : 건축,기계,전기,통신,조경,토목분야

- 앤드건축사사무소 대표 김중근 : 전시분야

◯ 해양관 보수·보강공사 설계

- 건축, 기계, 전기분야 설계자

□ 보고내용

◯ 해양관 리모델링 기본설계 완료보고

◯ 해양관 보수·보강공사 설계 중간보고

- 외부방사장 등 시설개선공사

- 기계설비 보수 및 교체공사

- 전기설비 보수 및 교체공사

Ⅴ		참 석 대 상

□ 서울대공원 : 대공원장, 관리부장, 동물원장, 시설과장, 조경과장, 동물기획과장, 동물복지2과장

◯ 용역감독 : 건축, 기계, 전기, 통신, 토목, 조경, 전시분야

□ 자 문 위 원

◯ 동물분야

- 고정락(제2롯데월드아쿠아리움 관장)

◯ 건축시공분야

- 동양미래대학교   교수 장덕배

- 씨엠파트너스건축 대표 전금석

□ 설  계  자 : 앤드건축사사무소 대표 김중근, 아뜰리에 리옹서울 대표 이소진, 건축, 기계, 전기분야 설계자

Ⅵ		자문수당 지급

□ 200,000원/인 × 3인 = 600,000원

◯ 사전검토수당 :  50,000원/인

◯ 자문수당     : 150,000원/인(2시간 이내 100,000원/인)

□ 예산과목 : 공원이용시민 만족도 향상, 산림내 이용시설 및 조경관리강화, 공원이용시설물 유지보수 및 정비, 사무관리비

Ⅶ		향 후 계 획

□ 2016.  9 : 설계용역 준공, 계약심사 및 공사발주

□ 2016. 10 ∼ 2017. 3 : 공사시행