투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	녹지관리과장
(경유)
제목	변경계약체결통보 - 2016년 뚝섬한강공원 게이트볼장 개선공사

1. 녹지관리과-3386(2016.8.5.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 아래와 같이 변경계약이 체결되었음을 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 계약현황

용 역 명	2016년 뚝섬한강공원 게이트볼장 개선공사
계약상대자	자성조경 (대표 : 김영환)
계 약 금 액	금211,460,450(금이억일천일백사십육만사백오십원)
계 약 일 자	2016.06.20.
공 사 기 간	2016.06.20. ~ 2016.08.08.

나. 변경내역 : 공사기간 변경(2016.06.20. ~ 2016.08.31.)

변 경 내 역	변경전	변경후
공 사 기 간	2016.06.20. ~ 2016.08.08.	2016.06.20. ~ 2016.08.31.

다. 변경사유 : 민원사항에 따른 설게변경 사유 발생 및 하천점용허가 변경 등 절대                          공기 부족.

붙     임 : 1. 공사변경계약서 1부.

2. 변경계약보증서 1부.  끝.

	총무부장
주무관	주홍열		총무과장	박병현		총무부장	08/16 이상국
협조자
시행	총무과-14249	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 (성수동1가)	/
전화	02-3780-0723	/전송	02-3780-0740	/		/	부분공개(5)