투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	변경계약 - 관급자재 수량변경(최종) 요청 (반포공원 교통개선 공사)

1. 시설관리과-2500(2016.8.11.)호와 관련 입니다.

2. 시설관리과에서 시행중인 ｢반포공원 교통개선 진출입 연결도로 정비공사｣에 소요되는 관급자재(아스콘 등)가 수량변경되어 아래와 같이 변경계약 하고자 합니다.

가. 변경계약 요청내용

남품요구번호	품 명	규격	물 품 식별번호	단위	당초		변경		증 감
					수량	금액	수량	금액	수량	금액
12-16-1 -24949-00	아스콘	w-4 t=20cm	22535420	톤	498	25,094,220	234	11,791,260	감)264	13,302,960
12-16-1 -34076-00		w-4 t=20cm	22535447	톤	276	13,311,480	276	13,311,480	-
12-16-1 -34076-00		BB-2 t=30cm	22535498	톤	190	7,214,300	104	3,948,880	감)86	3,265,4200
12-16-1 -24924-00	가 드 레 일	W2000 ×900	22141834	경간	264	71,808,000	156	42,432,000	감)108	29,376,000
12-16-1 -33939 -00	아스팔트 개질재	개질재 -130M	22748704	포	1,551	4,854,360	2,926	9,158,380	증)1375	4,303,750
12-16-1 -06114 -00	석재 블럭	200*250*1000,직선	20986878	개	7	94,360	0	0	감)7	94,360
		200*250*1000,경사	20986851	개	6	141,960	10	236,600	증)4	141,960
		20*25(10)*100,직선	20986886	개	71	1,836,060	71	1,836,060	-	-
		150*150*1000,직선	20985953	개	221	2,895,100	220	2,882,000	감)1	13,100
		150*150*1000,직선	20986873	개	88	4,338,400	88	4,338,400	-	-
		200*250*1000,직선	20985957	개	1,885	46,861,100	1,875	46,612,500	감)10	240,860
		20*25*100,곡선	20986872	개	48	2,020,320	0	0	감)48	2,020,320
12-16-1 -03344 -00	레미콘	25-21-120	10063096	㎥	669	42,140,310	650	40,943,500	감)19	1,196,810
		25-21-80	10063094	㎥	38	2,331,680	36	2,208,960	감)2	122,720
		25-18-120	10063091	㎥	249	14,486,820	232	13,497,760	감)11	989,060

나. 변경사유 : 설계변경 및 현장여건에 따른 변경.

붙  임 : 변경요청 내역 1부. 끝.

주무관	최유섭		총무과장	08/16 박병현
협조자
시행	총무과-14240	(		)	접수		(		)
우	04770	서울시 성동구 강변북로 257, 한강사업본부 총무과 (성수동1가 642-25번지)	/
전화	3780-0713	/전송	3780-0740	/	yschoi21@seoul.go.kr	/	부분공개(5)