투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	기전과장
(경유)
제목	광평교 보도낮춤 시공 변경계획 통보

1. 광평교 내구성 향상을 위한 보도낮춤 구조개선공사 변경계획(시설보수과-5567호, 2016.8.2.)과 관련입니다.

2. 광평교 보도낮춤 구조개선 사업계획이 아래와 같이 변경되어 시행하고자 하오니  『가로등 이설공사』 가 병행추진될 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 계획 변경내용

당초 : 하류측 보도(가락시장 → 수서방향)

추가 : 상류측 보도(수서역 → 가락시장)

나. 추진일정

하류측 : 2016.8 ~ 8.25

상류측 : 2016.8.25. ~ 9.9(예정)

다. 협조사항 : 상류측의 가로등 이설공사가 토목공사와 병행 추진될 수 있도록 조치요망

붙임 : 변경계획 방침서 1부.  끝.

	시설보수과장
주무관	나철흠		도로보수과장	08/18 김환겸
협조자
시행	시설보수과-5976	(		)	접수		(		)
우			/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2040-0382	/전송	02-2040-0308	/	cheolna@seoul.go.kr	/	대시민공개