서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	강서구청장(복지지원과장)
(경유)
제목	2016년 종합사회복지관 기능보강사업 변경 검토결과 통보(강서구-방화2)

1. 강서구 복지지원과-23329(2016.8.3.), 시 복지정책과-16160(2016.8.18.)호 관련입니다.

2. 2016년 종합사회복지관 기능보강사업 변경 검토결과를 다음과 같이 통보하니 조속히 추진토록 최선을 다하여 주시기 바랍니다.

○ 변경 요청사항

1) 대상시설 : 강서구 방화2종합사회복지관

2) 사 업 명 : 2층 강당 리모델링 공사(총사업비 25,300천원)

3) 변경사항

- 후면 칸막이 공사 → 무대공사 일부변경, 추가공사(에어컨 이전 설치, 벽면 인테리어공사 등)

- 일부공사 변경 및 추가에 따른 낙찰차액(2,991천원) 사용 승인 요청

○ 검토결과 : “승인” (붙임 참조)

- 기존 사업목적은 유지하면서 공사 진행의 효율성 및 강당 활용도 제고 방안으로 낙찰차액 사용 변경계획 적정

붙  임 : 검토결과(강서구-방화2).  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	임미란		시설지원팀장	오은미		복지정책과장	08/18 신종우
협조자
시행	복지정책과-16164	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 (태평로1가)	/
전화		/전송		/		/	대시민공개