문서번호	소방행정과-11221
결재일자	2016.8.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
담당자	장비회계팀장	소방행정과장	소방서장
이호경	황인대	박성근	08/19 이귀홍

본서 5층  의무소방대원 대기실 (휴게실) 철거 및 개선 계획

2016. 8. 19.

영등포소방서(소방행정과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

효율적인 소방청사 활용을 위한

본서 5층 기존 의무소방원이 사용했던 대기실(휴게실)

칸막이 및 바닥재 등을 철거하고, 보수하여 본서 청사 협소한

공간을 다용도실로 활용하고자 함.

Ⅰ. 추진 근거

소방행정과-96(2016.01.04.)호 『2016년도 소방안전특별회계 예산 편성결과 알림』

소방행정과-10928(2016.08.11.)호 『영등포소방서(본서)노후청사 환경개선 예산 재배청 요청』

Ⅱ. 예산현황 및 계약방법

예산확보 : 금10,000천원

예산과목  : 직무환경개선/소방관서 보수보강공사/공공운영비(201-02)

계약방법  : 전자수의시담(수의계약)

Ⅲ. 주요 공사 내용

대기실(휴게실) 칸막이(SGP) 철거

바닥 전기 판넬 등 철거후 바닥재 교체 및 벽(천정) 도색

방화문→ 강화도어 교체

각종 폐 집기류(책상, 쇼파, 파티션) 폐기 처분

기타 버티칼 설치 등

Ⅳ. 세부 추진 계획

대림119안전센터 청사환경 개선 및 재배치

일 정	세 부 일 정	비 고
8.19. ~ 8.23	발주계획 수립, 산출기초조사(시장가격조사)
8.24 ~ 8.26	입찰공고 및 계약체결
8.29 ~ 9.7	계약(착공) 준공, 검사(수), 대금지급

붙임  1. 5층 의무소방원 대기실(휴게실) 사진 1부.

2. 의무소방원 대기실(휴게실) 평면도 1부.  끝.