문서번호	총무과-14524
결재일자	2016.8.19.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	총무과장
임봉순	08/19 박병현
협 조
	주무관		송기호

한강여름캠핑장 기반공사

공사기간 연장보고

총 무 부

(총무과)

한강여름캠핑장 기반공사 기간 연장보고

2016년 한강여름캠핑장 운영이 연장 운영됨에 따라 기반시설 철거 및 정리를 위해 공사기간을 연장하고자 보고드림.

Ⅰ		근 거

○ 운영총괄과-6531호(2016.8.18.) 2016년 여름캠핑장 연장 변경계획

- 공사기한 연장운영 : 여의도캠핑장 ‘16.8.22 ~ 16.9.4

※ 잠원과 뚝섬은 당초대로 운영(‘16.7.14~8.21)

Ⅱ		공사 개요

○ 공 사 명 : 2016년 한강여름캠핑장 기반공사

○ 위     치 : 여의도,뚝섬,잠원공원

○ 공사 기간 : 2016.7.14. ~ 2016.8.23

○ 규      모

⁃ 전력케이블 신설  F-CV 6㎟×3C 2,877m, F-CV 35㎟×3C 222m

⁃ 전선관 배선  ELP 50∅×1,659m, 경고테이프 1,659m, 배관터파기 995㎥

⁃ 현장 분전함 10개소 구매설치

⁃ 광케이블 포설 SM 4CORE 486m,광단자함 4개설치

⁃ CCTV(52만화소) 8대 설치

○ 사  업  비 : 111,315,470원

○ 시  공  사 : 대양전설주식회사 대표 김삼래

Ⅲ		공사기한 연기

○ 연기사유 : 2016년 한강여름캠핑장 운영이 연장됨에 따라 공사기한 연장

○ 준공기한

- 당 초 : 2016.7.04. ~ 2016.8.23.

- 변 경 : 2016.7.04. ~ 2016.9.07.

Ⅴ		향후계획

○ 공사 계약기간 연장 의뢰 : 2016. 8. 22

○ 공사완료 : 2016. 9. 07

붙임 : 2016년 한강여름캠핑장 연장변경 계획 1부.끝.