문서번호	도로시설과-10004
결재일자	2016.8.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		터널복개팀장	도로시설과장
김성렬		김두석	08/19 송상영
협조
	주무관		전성민

예산재배정 검토 보고

(정릉천2복개구조물 보수공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.8

안전총괄본부

도로시설과

예산재배정 검토 보고

(정릉천2복개구조물 보수공사)

□ 사업시행 : 북부도로사업소 시설보수과

□ 사업개요

○ 시설물 현황

시설물명	종별	상태 등급	위 치	준공일	규 모		구조 형식
					폭	연장
정릉천2복개	1종	B	정릉4동 406(대동아) ~ 월곡동 90(전화국)	1989	20.4m~ 56.5m	2,466m	RC-T빔

○ 사업규 모 : 아스팔트포장 덧씌우기 53.48a, 실링보수 1,304m

단면보수 4,880.4㎡, 표면보수 1,705.6㎡ 신축이음보수

318m, 균열보수 434m 등

○ 총사업비 : 2,211,775천원(금회 :1,435,056,750원)

○ 사업기간 : 착수일로부터 2017. 10.30까지

- 금회 : 착수일로부터 ~ 2016. 12. 31까지

□ 추진현황 및 향후 계획

○ 2015. 5. ~ 2015. 12. : 정밀안전진단용역 시행

○ 2016. 6. ~ 2016.  7: 실시설계용역 시행

○ 2016. 7. 12 : 계약심사요청

○ 2016. 8.     : 공사발주 및 착공

○ 2016. 8 ~ 12  : 공사시행 및 준공(1차)

○ 2017. 3 ~ 10. 30  : 공사시행 및 준공(2차)

□ 예산배정 현황

(단위 : 천원)

예산과목	예산액	기 재배정액	재배정 요구액	재배정 잔액	산출내역
시설비	1,478,614	49,379	1,429,235	0	실시설계내역서

※ 예산과목:도로시설관리,하천복개구조물관리(도시개발특별회계),정릉천2 복개 구조물 보수공사,시설비및부대비,시설비

□ 검토의견

○ 2015년 정릉천2복개 구조물에 대한 정밀안전진단 결과 장기공용에    따른 손상부위에 대한 보수공사 시행을 위해 2016년 실시설계용역    결과에 따라 시설물의 내구성 증대를 위해 시행하는 사업으로

○ 계약심사가 완료(8. 3)되어 소요 사업비가 확정되었기에 총 사업예산 중 2016년 편성된 사업예산을 재배정 코자 함.

※ 기 배정예산(실시설계용역비) 49,379,000원을 제외한 잔여 예산

배정(1,429,235천원)

붙 임: 예산재배정 요청공문 및 관련자료.