문서번호	시설관리과-22858
결재일자	2016.8.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설관리과장	남부수도사업소장
권승계	강동철	천성훈	08/19 代이두영
협 조
	급수운영과장		최철민
	주무관		강동길
	주무관		류태현

『2017년도 금천배수지외 16개소』 정밀안전진단 및 정밀점검 계획

2016. 8.

『2017년도 금천배수지외 16개소』

정밀안전진단 및 정밀점검 계획

시설물의 안전관리에 관한 특별법 제7조 및 동법 시행령 제9조에 의거 2017년도 금천배수지외 16개소에 대한 정밀안전진단 및 정밀점검 계획을 수립, 구조물의 안정성을 확보하여 시설물관리에 만전을 기하고자함.

※ 관련근거

시설물의 안전관리에 관한 특별법 제7조 및 동법시행령 제9조

’17년도 사업소별 안전진단 및 점검대상 알림(본부 시설관리과-7808호, ’16.08.12)

Ⅰ

현 황

대 상 : 17개소(급수운영과:8개소, 시설관리과:9개소)

구 분	계	시 설 물 명	준공년도	용량(㎥)	비 고
정밀안전진단 (5년에 1회)	9	금천배수지	2000	60,000	급수운영과
		노량진배수지	2001	110,000	시설관리과
		대방배수지	1995	60,000	시설관리과
		봉현배수지	2006	2,500	시설관리과
		봉천11배수지	2006	3,000	급수운영과
		노량진가압장	2001	일 300,000	시설관리과
		금천가압장	2003	일40,000	급수운영과
		대방가압장	1995	일205,000	시설관리과
		봉천11가압장	2006	일7,000	급수운영과
정밀점검 (2년에 1회)	8	상도배수지	2004	30,000	시설관리과
		상도3배수지	1995	2,000	시설관리과
		신림6배수지	2005	20,000	급수운영과
		장군봉배수지	2008	10,000	급수운영과
		신림2-1배수지	2000	3,500	급수운영과
		상도가압장	2004	일98,000	시설관리과
		상도3가압장	1995	일4,000	시설관리과
		신림6가압장	2005	일27,000	급수운영과

시행시기

2017년 4월 ~ 2017년 12월 (상 ‧ 하반기 배수지청소 시 점검)

소요예산

사업비 : 266백만원

예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선교체비(기타교체비)

설계방법(기준)

국토해양부고시 제2013-200호(2013.4.26) 『안전점검 및 정밀안전진단 대가(비용산정)기준』에 의거

Ⅱ

추진계획

추진일정

2016년 8월  : 자료조사 및 설계서 작성(과별)

※ 2016년도 공표한 노임단가 적용하여 설계

2016년 9월  : 기술용역타당성 설계심사 요청(본청 기술심사담당관)

2017년 3월  : 설계심사 결과에 의거 과별 또는 통합발주 및 용역계약

2017년 4월 ~ 11월 : 정밀안전진단 및 정밀점검 용역시행

2017년 11월 ~ 12월 : 용역준공(최종 성과물 제출)

※ 최소 준공 1개월전에 건설기술 심의 이행(서울특별시 건설기술심의위원회 조례 제3조 및 같은 조례 시행규칙 제6조내지 제7지

Ⅲ

주요 진단(점검)및 방법

주요 추진사항

시험, 측정장비 및 육안조사등을 통한 시설물의 안전성 및 결함의 원인 등 조사, 분석하여 보강방법 제시

진단(점검)결과에 따른 보수ㆍ보강 시설개량, 하자보수등으로 배수지 기능 회복

진단(점검) 방법

사전조사를 실시하여 도면작성 및 계획 수립

정밀안전진단에 필요한 설계도면, 시방서, 사용재료 내역 등 시공관련 자료의 수집 및 현장조사를 통한 사전검사

정밀 육안검사 및 진단 측정 장비를 사용하여 측정 및 검사

시설물의 구조적, 기능적 상태 평가 및 안정성 평가와 이에 따른 종합평가

정밀안전진단 및 정밀점검 결과 평가에 따른 보수, 보강방법 제출

- 시설물의 안전점검 및 정밀안전진단 지침(국토해양부고시 제2010-1037호(2010.12. .개정)

□ 정밀안전진단 : 시설물의 결함 정도에 따라 조사․측정․시험, 구조계산, 수치해석 등을 실시,분석․검토하여 안전성평가 결과를 결정하고. 또한 필요한 경우에는 구조물의 사용성, 내진성능등 평가결과 보수․보강이 필요한 경우에는 보수․보강방법을 제시

□ 정밀점검 : 시설물의 외관조사 및 측정․시험 결과와 이전의 안전점검 및 정밀안전진단 실시결과의 상태평가 결과와 비교․검토하며 상태평가 결과를 결정 및 결함부위 등 주요 부위에 대한 외관조사망도 작성 등 조사결과를 도면으로 기록하여야 한다.

보수, 보강을 위한 방법 및 설계도서 제출

Ⅳ

행정사항

과별로 용역설계서를 작성하여 본청에 기술용역 타당성 심사를 의뢰후 그 결과를 본부 시설관리과에 2015.9.9까지 보고

붙임 : ’17년 사업소별 안전진단 및 점검대상 및 관련 공문 1부. 끝.