문서번호	토목부-17069
결재일자	2016.8.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
전병철		권혁대	08/18 김영수
협조

- 올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사 관련 -

공사 중지기간 중  운영 관리방안 검토

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 08.

도시기반시설본부

토목부

- 올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사 관련 -

공사 중지기간 중  운영 관리방안 검토

올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사 소규모 환경영향평가 및 하천점용허가로 인한 일시공사 중지기간(‘16.08.09~‘16.10.30) 중 현장 운영 관리방안에 대한 검토 보고임.

【관련근거 : 올대감16-028호(16. 08. 16】

Ⅰ				사업개요

○ 위    치 : 송파구 풍납동 일대

○ 규    모

- 램프신설 : L=1,388m(교량 446m 포함)

- 램프이설 : L=1,309m(교량 139m 포함)

- 올림픽대로 이설 : 하남방향(L=1.21Km), 김포방향(L=1.21Km)

○ 공사기간 : '16. 03.  ~ '19. 12.(1차 : ‘16.04.01 ~ ’17.01.25)

○ 총사업비 : 47,343백만원(‘16년 5,416백만원)

Ⅱ				추진경위

○‘14. 07.     : 전략 환경영향평가 완료

○‘14. 10. 27 : 소규모 환경영향평가 대상여부 질의(서울시 → 환경부)

- 소규모 환경영향평가 대상이지만 전략환경평가를 득한경우 제외 될수

있음.(‘14. 11. 27 환경부 답변)

○‘16. 05. 11 : 서울지방국토관리청 협의방문

- 일시 및 영구 점용면적10,000㎡ 이상시 소규모 환경영향평가 대상

○‘16. 06. 29 : 소규모 환경영향평가 대상여부 질의(서울시 → 환경부)

- 전략적 환경영향평가시 소규모 환경영향평가 세부항목을 전부 검토하였다면

협의요청 절차를 생략가능하고 소규모 환경영향 평가의 세부항목이 검토

되었는지 여부는 협의기관에서 판단할 사항임.(‘14.07.04 환경부 답변)

○‘16. 07. 05 : 소규모 환경영향평가 대상여부 질의(서울시 → 한강유역환경청)

- 전략환경영향평가 협의시 동 개발사업의 시행으로 인한 소규모 환경

영향평가의 세부항목에 대하여 전부 검토되었다고 판단하기 어려우며

개별 사업계획 수립시행시『환경영향평가법』에 따라 환경영향평가

등의 절차를 이행(‘16.07.14 한강유역환경청 답변)

○‘16. 07. 26 : 소규모 환경영향 평가 용역 발주

○‘16. 08. 08 : 공사중지통보(도시가반시설본부→감리단)

○‘16. 08. 16 : 소규모 환경영향 평가 용역 계약

- 용역업체 : ㈜이엔씨기술 대 표 정 상 철

Ⅲ				현장 운영 관리방안

□ 감리단 운영 관리방안

○ 운영기간 :‘16 .08. 09 ~ 16. 10. 30(83일)

※ 소규모 환경영향평가 및 하천점용허가 결과에 따라 운영기간 조정

○ 운영방법 : 감리인원 최소화(인력축소)

- 현재 감리 2명 사무보조원 1명으로 운영되고 있으나, 공사중지 기간중 최소 인원

(책임기술자1명, 사무보조원1명)으로 감리업무 수행

※ 분야별 기술자는 감리용역 계약(1차) 투입계획에 의거 철수(‘16. 07. 28)

○ 주요업무내용

- 환경영향평가 및 하천점용허가지원업무 수행

- 시공단계 관계기관협의, 공사관련 각종 업무연락 및 실정보고

- 발주처 지원업무 등 감리 업무수행

구 분		‘16년8월			‘16년9월			‘16년10월			‘16년11월			비고
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
o 소규모환경향향평가
o 하천점용허가		서류사전심사								승인
o 주요업무	-환평 및 점용허가지원업무
	-시공단계 관계기관협의
	-실정보고
	-각종업무연락
	-발주처지원업무
	-실착공전 시공계획수립
o 실착공

○ 감리비 산정내역

구 분	산 출 근 거		비 고 (증·감)
	현 행	변 경
책임 기술자	527,710원/일 × 83일=43,800천원	527,710원/일 × 83=43,800천원	-
분야별 기술자	451,807원/일 × 83일=37,500천원	-	감)37,500천원
사무보조원	107,229원/일 × 83일=8,900천원	107,229원/일 × 83일=8,900천원	-
계	90,200천원	52,700천원	감)37,500천원

□ 시공사 운영 관리방안

○ 운영기간 :‘16 .08. 09 ~ 16. 10. 30(83일)

○ 운영방법 : 인력 최소화(인력축소)

※ 소규모 환경영향평가 및 하천점용허가 결과에 따라 운영기간 조정

- 공사중지 기간중 업무 수행을 위한 최소 인원(현장대리인1명, 공무1명) 배치

※ 공사 중지 기간중 발생되는 관리비(간접비)는 실정산 공사(1차)에 반영

(전체 공기 연장시 간접비 청구 방지를 위한 합의각서 징구)

○ 주요업무내용

- 상·하수도 이설 및 하천점용허가 지원

- 하수BOX이설 연장조정,수목이식 수량변경, 한강사업본부 요청사항등 인·허가

결과에 따른 실정보고

- 상·하수도 이설업체, 조경업체, 구조물업체 선정등 실착공 업무수행

- 담당관련부서(안전과등) 수시 업무연락에 대한 대응체계 유지

구 분		‘16년8월			‘16년9월			‘16년10월			‘16년11월			비고
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
주 요 업 무	- 하천점용허가 지원
	- 상·하수도 이설
	- 하수BOX이설 실정보고
	- 상하수도 이설업체 선정등
	- 발주처 업무연락 보고
실 착 공

○ 간접비 산정내역

구 분		산 출 근 거		비 고 (증·감)
		현 행	변 경
노 무비	현장대리인	222,332원/일 × 83일=18,454천원	222,332원/일 × 83일=18,453천원	-
	공무팀장	191,750원/일 × 83일=15,912천원	191,750원/일 × 83일=15,912천원	-
	공무과장	156,266원/일 × 83일=12,970천원	-	감)12,970
사무실 임차비		147,065원/일 × 83일=12,206천원	147,065원/일 × 83일=12,206원
관리비	유 류 비	10,760원/일 × 53일(휴일제외) × 3인=1,711천원	10,760원/일 × 53일(휴일제외) × 2인=1,140천원	감)571
	복 사 기 임 대 료	10,043원/일 x 83일=833천원	10,043원/일 x 83일=833천원	-
	사 무 용 품 비	7,174원/일 x 83일=595천원	7,174원/일 x 83일=595천원	-
	통 신 비	{(1,040원/일(전화) x 3인 x 83일)} +717원(인터넷)x83일=319천원	{1,040원/일(전화) x 2인 x 83일)} +717원(인터넷) x 83일=232천원	감)87천원
계		63,000천원	49,371천원	감)13,629천원

Ⅳ				조치의견

○ 소규모 환경영향평가 및 하천점용 허가로 인한 공사중지 기간중 현장

운영 관리방안 실정보고 사항에 대해 책임건설기술자의 검토 의견이 타당

하다고 사료되어 승인 처리 하고자 함.

붙임 : 감리단 검토의견 1부. 끝