투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	제1회 설계변경 계약의뢰(서울지하철 9호선 연장구간 정보통신설비공사(총차))

1. 조달청 관리번호 1#######00(‘12.12.26.)호, 도시철도설비부-1607(’14.2.18)와 관련입니다.

2. 우리본부에서 시행중인 서울지하철 9호선 2단계 정보통신설비공사(총차) 제1회 설계 변경을 아래와 같이 계약의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 서울지하철 9호선 연장건설(2단계) 정보통신설비공사

나. 계 약 자 : 대선이엔씨㈜  최승재

다. 감 리 사 : 벽산파워(주)외 2개사 공동도급(분담이행방식)

라. 계약기간 : ‘12. 12. 26 ∼ ’14. 09. 11

마. 계약변경 현황

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비 고
총차(설계변경)	4,224,427,066	4,670,024,000	증 445,596,934원	2014년 예산

바. 계약방법 : 장기계속공사

사. 예산과목 : 도시기반시설본부, 도시철도건설, 도시철도건설사업, 도시철도9호선2단계건설, 시설비 및 부대비, 시설비.

첨 부   1. 설계변경 보고서  1부.

2. 감리검토보고서 1부. 끝.

	도시철도설비부장
주무관	배종수		정보통신과장	02/19 이용기
협조자
시행	도시철도설비부-1632	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울시 중구 예장동 산5-85 도시기반시설본부 도시철도국 도시철도설비부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	772-7320	/전송	772-7308	/	baejs@seoul.go.kr	/	대시민공개