문서번호	보수과-492
결재일자	2014.2.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		보수과장	소장
서영호		남효돈	02/19 유성종
협 조
	운영과장			김영배

1정수장 여과지

하부집수장치 개선공사 계획보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 2

암사아리수정수센터

(보수과)

1정수장 여과지

하부집수장치 개선공사 계획보고

’86~’89년도에 시공된 1정수장 여과지(하부집수장치)에 대해서 기존 스트레이너블럭이 노후화 되고 사수지역으로 인한 오니의 퇴적이 발생됨에 따라 이를 개선하여 깨끗하고 안전한 수돗물 생산 및 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 보고드림.

□ 사업개요

❍ 공 사 명 : 1정수장 여과지 하부집수장치 개선공사

❍ 공사규모 : 여과지 11개지 개량(구조물 및 하부집수장치개선)

❍ 소요예산 : 2,300백만원

❍ 공사기간 : 착공일로부터 240일간

❍ 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비

□ 사업대상 현황

❍ 1정수장 여과지(하부집수장치)

구 분	대상 여과지	2012년	2013년	2014년	잔여량	비 고
1정수장 여과지	64지	16지	12지	11지	25지	연차적 사업시행

□ 보고내용

❍ 시공계획

- 1정수장 여과지 시설이 25년이상 경과하여 여과지 하부집수장치(스트레이너 블록,스트레이너)가 노후화되고 사수지역으로 인한 오니의 퇴적이 발생되며 스트레이너 이탈현상이 됨에 따라

- 이를 개선하여 깨끗하고 안전한 수돗물을 생산 공급하고자 하며,

- 또한 여과지 하부 구조물이 노후되고 개선된 여과블럭을 설치시 받침보 간격이 맞지 않아 철거후 설치하여 여과효율을 극대화 하고자 함.

- 설치 단면도

개 선 전	개 선 후

상수도시설기준(2010년) 390페이지

❍ 자재구매 발주

- 스트레이너 및 스트레이너 블록

∙ 본 제품은 서울소재 정수장(영등포, 광암)에서도 이미 설치되어 운영되고 있으며,

∙ 2012~3년도 개선된 여과지 스트레이너블록으로 설계 시공 완료.

❍ 공사 입찰방법

- 제한경쟁입찰

∙ 여과지 하부집수장치 개선공사는 난이도가 높은 전문공사로서 시공경험이 없으면 원하는 성과물을 얻기 어려우며, 향후 시설물 유지관리에 어려움이 있을 것으로,

∙ 동일공사 시공경험이 있는 업체를 선정하는 것이 타당하다고 사료되어 지방자체단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제9조2항에 의거 동일공사(정수장 하부집수장치개선공사) 실적이 있는 업체로 제한 코자함.

□ 향후계획

❍ 상기 내용과 같이 여과지 하부집수장치 개선공사를 시행하여 안전하고 맛있는 수돗물 공급에 만전을 기하고자 하며,

❍ 1정수장 여과지 교체 대상지는 운영과와 협의하여 여과효율이 떨어진 여과지부터 우선적으로 선정 시행.

❍ 공사추진계획

- 계약심사 : 2014. 02. 21

- 공사발주 : 2014. 02. 28

- 관급자재구매 : 2014. 03. 14.  끝.