문서번호	보수과-485
결재일자	2014.2.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		보수과장	소장
임기봉		남효돈	02/19 유성종
협조

2정수장 침전지 슬러지배관 교체 계획

2014. 2.

암사아리수정수센터

(보수과)

2정수장 침전지 슬러지배관 교체 계획

노후로 부식된 슬러지배관을 교체하여 침전지의 원활한 운영으로 안정적인 아리수 공급에 만전을 기하고자 함.

□ 슬러지배관 현황

위 치	시설현황	개 소	설치년도	용 도	비 고
2정수장 침전지 지하배관실	침전슬러지 이송배관 및 밸브 (Ø200, Ø400)	침전지 8지 16개소 (1지당 2개소)	1998	침전지에 적치된 슬러지 배출,이송용
교체대상	침전지 1~4지 (2012년 5~8지 완료)

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 2정수장 침전지 슬러지배관 교체

○ 사업내용 : 슬러지배관 및 밸브 교체 1식

- 밸브 및 신축관이음은 기 설치된 제품과 동일제품으로 조달제3자단가 구매

(게이트밸브 Ø200 : 24개, 버터공압밸브 Ø400 : 8개, 신축관이음 Ø400 : 8개)

○ 교체대상 : 침전지 1~4지

○ 사업기간 : 2014. 4. ～ 2014. 10.

※ 침전지 청소와 병행하여 실시하므로 청소일정에 따라 변경가능

○ 사 업 비 : 132 백만원

○ 예산과목 : 자본적지출, 가동설비자산, 기계장치, 시설비 등

□ 추진일정

○ 2014. 2. 20 ～    2. 21 : 밸브류 조달제3자단가 발주

○ 2014. 2. 24  ~  2. 28 : 공사설계

○ 2014. 3.  3  ~  3. 17  : 사업발주(자체)

○ 2014. 4.  1  ~ 10. 31 : 사업시행

□ 발주방법

○ 일반경쟁입찰. 끝.