문서번호	주차계획과-11291
결재일자	2016.8.22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주차시설팀장	주차계획과장
금종융		전태호	08/22 윤보영
협조

천호3동 주택가 공동주차장 건설

예산 재배정 검토

2016. 8.

도시교통본부

(주차계획과)

천호3동 주택가 주차장 건설 예산 재배정 검토

강동구에서 추진중인 『천호3동 주택가 공동주차장 건설사업』 관련 ‘15년 예산(명시이월) 및 ’16 본예산 주차장 사업비(시비) 재배정 요청함에 따른 검토결과 보고

Ⅰ. 사업개요

○ 위    치 : 강동구 성안로31마길 3(천호동 174-1외 9필지)

○ 규    모 : 11,862백만원(주차장 8,808, 도서관 3,054)

- 주 차 장 : 199면 (지하3층~지상1층, 연면적 6,771㎡)

- 복합시설 : 도서관 (지상2층, 929㎡)

○ 총사업비 : 8,808백만원(시비 5,285, 구비 3,523)

- 시비 : ‘15년(명시이월):3,785백만원, ’16년(본예산):1,500백만원

○ 사업기간 : ‘14.10 ~ ‘17.6.

Ⅱ. 추진 경위(계획)

○ ‘14.3.28 : 천호3동 제2공영주차장 건설계획 수립

○  ‘14.8.27 : 시 투자심사

○  ‘15.6.17~’16.1.12 : 기본 및 실시설계 용역

○  ‘15.12.31 : 공사 발주

○  ‘16.2.28 : ’15사고이월 예산 재배정 (3,785백만원)

○  ‘16.3.9 : 주차장 운영,관리 협약 체결 협의 (시→구)

○  ‘16.3.16 : 협약서 내용중 소유권 관련 자치구 미동의

○  ‘16.4.28 : ’15사고이월 재배정 예산 중 10억 감배정

○  ‘16.8월중 : 2차공사 발주 예정

Ⅲ. 세부 검토 내역

□ 천호3동 주택가 공동주차장 건설 예산 재배정 요청

- 관련공문 : 강동구 교통지도과-18208호 (‘16.7.29)

□ 주차장 분야별 사업비 (단위: 백만원)

구 분		사업비	시비	구비	발주시기	비고
계		8,808	5,285	3,523
설계용역	설계용역	461	277	184	‘15.12 완료
공사비	토목,건축	6,449	3869	2580	‘16.1~
	전 기	706	424	282	〃
	소방,전기	197	118	79	〃
	통 신	434	260	174	〃
	폐기물	59	35	24	〃
감리비	감리비	484	290	194	〃
부대비	시설부대비	18	11	7

□ 예산 재배정 검토

○ 사업비 배정현황 (시설비, 단위: 백만원)

구분	계	‘15년이전	‘16년(이월포함)				비고
			계	기배정	금회배정	차후배정
계	8,808	3,523	5,285	2,785	1,000	1,500
시비	5,285	-	5,285	2,785	1,000	1,500
구비	3,523	3,523	-	-	-	-

□ 요청 사유

○ ‘16.8월 중 공사(토목,건축) 2차발주를 위한 시비예산 재배정 요청

□ 검토 의견

○ ‘15.12월말 공사발주 후 정상적으로 추진중(공정 30%)에 있어 원활한 사업추진을 위해 10억원을 우선 재배정함이 타당하다고 판단됨

○ 다만, 준공 후 우리시로의 소유권 일원화 내용을 담은 협약체결은 우리시의 원칙인 만큼 조속히 이행토록 하고, 금년도 예산 잔액은 이후 재배정토록 할 계획임

첨부   예산재배정 요청공문 1부.   끝.