문서번호	정수시설과-8960
결재일자	2016.8.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
최년수		유영춘	08/22 이성락
협 조
	행정관리과장			안창수
	주무관			김흥만
	주무관			박응희

생태연못 수질 개선계획 추진(안)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 8.

정수시설과

생태연못 수질 개선계획 추진(안)

우리센터 자연친화적 쉼터인 연못에 한강 물을 사용함으로써 하절기 수온상승시 수생식물의 과다한 증식으로 연못 관리에 어려움이 있는바, 이를 개선하여 맑고 깨끗한 정수센터 이미지 제고

□ 추진배경

○ 연못에 정수된 물을 사용토록 설계되었으나 한강물을 사용함에 따라        기온상승시 수생식물(개구리밥등) 과다 생육

○ 연못으로 인한 정수센터의 맑고 깨끗한 이미지 실추

□ 현황 및 실태

○ 연못내 수생식물 과다 생육으로 맑고 깨끗한 아리수 정수센터 이미지 저감

○ 질소, 인등 성분 과다 및 용존산소 부족(3급수이하)

○ 봄, 여름, 가을(4-10월) 연못 수온상승 수질악화

○ 수질개선을 위한 정화설비(분수,에어펌프) 미설치

※ 연못의 수질분석 결과

구 분	BOD	COD	SS	TN	TP
상단(유입)	3.6	5.6	11.2	3.544	0.173
하단(퇴수)	1.7	3.3	5.2	3.432	0.121

□ 세부추진계획

○ 추진방향

- 수질개선을 위한 연못 상단부 수생식물(수련,부들등) 식재

- 분수펌프 및 공기투입기 설치(용전산소 향상)

- 연못의 퇴수 재활용(순환펌프 설치)

○ 1차 추진사항

- 연못 상단부 수생식물 식재 및 물막이 자갈투입 (조경관리용역 활용)

- 분수펌프 설치 (기계분야 연가단가계약 활용)

○ 1차 소요예상액 : 1,200,000원

- 수생식물 식재 및 물막이 자갈 투입 : 400,000원

- 분수펌프 : 800,000원
○ 1차 추진일정

- 2016. 8.  분수 3대 설치

- 2016. 8. ~ 9. 수생식물 식재 및 물막이 자갈투입(연못상부)

○ 운영방법 : 봄, 여름, 가을 활용

○ 관리방법(개선후)

- 분수등 기전설비 관리 : 정수시설과

- 연못 주기적 청소관리(주 1회이상) : 행정관리과

□ 향후계획

○ 1차 추진결과 효과가 미흡할 경우 2차 개선사항 추진

○ 2차 추진내용(점진적 추진)

- 추진사항

· 연못 퇴수물 순환설비 수리 및 설치(펌프설비) : 한강물과 혼합 사용

· 연못내 공기 투입기(소형 에어펌프) 설치

· 수생식물 다양화 및 재배면적 확대

- 소요예상액 : 1,400,000원

· 에어펌프 설치 : 300,000원
· 순환설비(모터펌프등) 수리 및 설치 : 1,100,000원

□ 기대효과

○ 연못의 수질개선으로 맑고 깨끗한 정수센터의 이미지 제고