서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	용역 계약변경(과업기간 연장) 의뢰

1. 건축기획과-11388(2016.6.1)호와 관련입니다.

2. 우리과에서 추진 중인 “녹색건축물 실태조사 및 거주자 만족도 조사를 통한 인증후 관리방안 연구용역”에 대하여 다음과 같이 계약변경을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

다      음  -

가. 계약건명 : 녹색건축물 실태조사 및 거주자 만족도 조사를 통한 인증후 관리방안 연구

나. 계약번호 : 20150*******00

다. 계약기간

- 당  초 : 2015. 6.23 ~ 2016. 6.21

- 변  경 : 2015. 6.23 ~ 2016. 8.21

라. 계약금액 : 141,590,000원(변경없음)

마. 계 약 자 : (사)한국환경건축연구원 외 1개사

바. 계약변경 사유

- 녹색건축 인증건축물 실태조사를 위한 인증자료 제공협조건츠로 인증관리기관인 국토교통부와 협의기간이 소요되어 충실한 실태조사를 위해 협의기간에 상당하는 과업기간 연장

붙 임 : 1. 계약변경 방침서 1부
2. 계약변경 합의서 1부
3. 계약변경(과업기간 변경) 의뢰서 1부.   끝.

	건축기획과장
주무관	공경배		녹색건축팀장	이성호		건축기획과장	06/08 한병용
협조자	계약2팀장	홍연화
시행	건축기획과-11819	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110(태평로1가)	/
전화	02-2133-7105	/전송		/	minerva0802@seoul.go.kr	/	부분공개(5)