투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	변경계약 - 관급자재 납품기한 연기요청(2016년 한강숲(망원) 조성 공사)

1. 기반시설과-3081(2016.8.8.)호와 관련 입니다.

2. 기반시설과에서 시행중인 ｢2016년 한강숲(망원) 조성 공사｣ 관급자재에 대해 아래와 같이 납품기한 변경이 있어 변경계약하고자 합니다.

가. 건명 : 관급자재 납품기한 연기요청(2016년 한강숲(망원) 조성 공사)               나. 납품기한 연기 요청 내역

○ 계약번호 : 00145052301

납품요구번호	물품식별번호	품명	단위	수량	납품기한 연기		비고
					당초	변경
12-16-1-38143-00	22675852	구절초 식물매트	매	270	2016.7.31	2016.10.14
12-16-1-38143-00	22675863	비비추 식물매트	매	432	2016.7.31	2016.10.14
12-16-1-38143-00	22675865	샤스타데이지 식물매트	매	1998	2016.7.31	2016.10.14
12-16-1-38143-00	22675867	수호초 식물매트	매	378	2016.7.31	2016.10.14
12-16-1-38143-00	22675868	쑥부쟁이 식물매트	매	378	2016.7.31	2016.10.14
12-16-1-38143-00	22675869	옥잠화 식물매트	매	486	2016.7.31	2016.10.14
12-16-1-38143-00	22675880	벌개미취 식물매트	매	324	2016.7.31	2016.10.14

○ 계약번호 : 00145061102

납품요구번호	물품식별번호	품명	단위	수량	납품기한 연기		비고
					당초	변경
12-16-1-27562-00	22437607	장미 (데임드꼬르)	개	300	2016.7.30	2016.10.14
12-16-1-38143-00	22437611	장미 (슈터스골드)	개	300	2016.7.30	2016.10.14
12-16-1-38143-00	22437294	장미 (블루리버)	개	300	2016.7.30	2016.10.14
12-16-1-38143-00	22438348	장미 (스칼렛 메이딜란드)	개	24	2016.7.30	2016.10.14

다. 연기사유: 여름철 혹서기 및 장마기로 식재가 적합하지 않아 공사 중지(‘16.7.28~8.31)한 상태로 본공사 전체 공정상 시기 미도래로 납품기한을 연기

붙  임 : 변경요청 내역 1부.  끝.

주무관	최유섭		총무과장	08/22 박병현
협조자
시행	총무과-14615	(		)	접수		(		)
우	04770	서울시 성동구 강변북로 257, 한강사업본부 총무과 (성수동1가 642-25번지)	/
전화	3780-0713	/전송	3780-0740	/	yschoi21@seoul.go.kr	/	부분공개(5)