문서번호	시설관리과-23255
결재일자	2016.8.23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
박행종		代박행종	08/23 천성훈
협조

상수도 이설 착공계 제출에 따른 검토보고

【도림로확장공사(2016) 구간내 상수도이설공사】

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 8

남부수도사업소

시설관리과

상수도 이설 착공계 제출에 따른 검토보고

【도림로확장공사(2016) 구간내 상수도이설공사】

*************도림로확장공사(2016) 구간내 상수도이설공사』***************

관련근거

도로과-15207(2016.08.22.)호와 관련임.

********

******************* 신성월드건업  대표 이강용

***************************

******

*********** 도림1배수분구 하수관로공사 구간내 상수도이설공사

공사위치  : 신길동 355-662 ~ 420-192앞(관경 : 300mm)

공사기간  :  '16. 3. 23. ~ ‘16. 12. 22.

상수관로 이설기간 : '16. 8. 24 ~ 8.26 (주간)

상수관로 이설개요 : D=100~300mm  L=138m (이설배관)

(※ 소화전×1개소 이설 포함)

단수일시 :  ‘16. 07. 08(금) 13:30 ~ 15:30

단수세대 : 20세대(신길동 355-662 ~ 420-192앞 주변)

시공회사 : 진일건설  대표 김영욱

단수계획

연번	단 수 위 치	단수예정일	단수예정시간	단수세대	작업일수
1	신길동 355-662~ 420-192 일대 (D=300mm)	8월25일(목) 8월26일(금)	14:00 ~ 16:00 (2시간)	30세대	주간 2일

단수세대 급수방안

현장 확인결과 위 단수세대 건물은 30세대이며, 사전 공사 관련 홍보 및 협의를 통해 주간공사를 신속히 시행하여 급수불편을 최소화 함.

(단수시간 : 2시간 이내)

홍보계획

단수안내문 배포 및 부착[***********]

- 단수지역에 안내문을 제작하여 공사 1일전 1가구 1매씩 배포

- 벽보용 안내문을 통행이 많은 단수지역 골목입구 및 골목내에 부착

홈페이지 단수안내 게재

- 상수도사업본부 홈페이지 단수안내(남부수도사업소)

민원발생이 많은 영업집 단수안내[***********]

- 음식점, 교회 등 수돗물을 많이 사용하는 영업집은 직접방문하여   단수안내문을 전달하고 사유를 설명.

- 사용할 수돗물을 단수전에 미리 물탱크 등에 받아 충분히 사용토록 안내.

비상시 급수차지원(남부수도사업소)

- 단수지역 주민이 급수차 지원요청시 남부수도사업소 보유 급수차로 수돗물 공급

- 단수지역 주민에게 공급할 수 있도록 수돗물 PET병 확보

공사 관계자 비상연락처

구 분	성 명	연 락 처
시공회사	***********	************
현장대리인	***	*************
현장소장	***	*************
공사 감독	************	*************
상수도관리	**********	*********

시공참여자

연번	업 무	성 명	주민등록번호	주 소	자격사항
*	현장대리인	이병숙	**************	서울 영등포구 대림동713-13
*	배관공	편기정	**************	서울 금천구 독산동 978-4
*	배관공	이종기	**************	서울 영등포구 대림동 860-38
*	배관공	유창현	**************	서울시 구로구 가리봉동 136-15
*	배관공	구재홍	**************	서울시 서대문구 홍제동 문화촌현대아파트103-1802
*	배관공	안대성	**************	서울시 영등포구 대림동 860-46

검토 및 처리의견

영등포구청 도로과는 ***********이 단수 홍보계획에 따라 홍보를 차질 없이 진행할 수 있도록 관리 감독하여 급수운영에 지장이 없도록 조치

계획된 시간내에 배수관로 연결작업이 완료 될 수 있도록 철저한 작업계획을 수립하고, 단수시간이 최소화 되도록 자재준비 및 인력, 장비 등 사전확보

조치의견

본 계획을 영등포구청 도로과에 통보하여 상수도시설 이설공사와 관련하여 단수작업 및 수돗물 공급에 차질이 없도록 조치하고자 함

첨 부 :  1. 시공계획서 1부.

2. 착공계(단수안내문 포함) 및 관련서류 각1부.

3. 상수도관 이설승인조건 1부.  끝.