문서번호	급수운영과-23473
결재일자	2016.8.23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
김효경		유명은	08/23 代유명은
협 조

급수공사 현장 실정보고

2016. 8.

강서수도사업소

급수운영과

「공사명 : ***************** 간선배관공사」

급수공사 현장 실정보고

********** [도시형생활주택(단지형다세대)]의 급수공사 신청에 따라 미급수 지역에 상수도관 부설공사 계획 중 ******(단독주택) 추가 급수공사 신청에 따라 변경상황이 발생되어 현장조사 후 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2016. 8. 23.

보고자 : 시설9급  성명 김 효 경

□ 공사 현황

- 공 사 명 : ***************** 간선배관 공사

- 위    치 : *************** 일대

- 공사개요 ① 당초 : D=50 ~ 100㎜, L=50m(D100㎜ × 20m, D50㎜ × 30m)

② 변경 : D=100㎜, L=50m

- 민원내용 : 구로구 ****** (단독주택) 급수공사 추가신청에 따른 관말 구경확대

□ 공사계획 변경

당 초(D100㎜ × 20m, D50㎜ × 30m)	변 경(D=100㎜, L=50m)

- ********** (단독주택) 급수공사 추가신청에 따라 급수수요가 증가가 발생되어 당초 작업지시[D=50 ~ 100㎜, L=50m(D100㎜ × 20m, D50㎜ × 30m)]를 D=100㎜, L=50m로 변경하여 원활하고 안정된 아리수 공급이 될수있도록 할 예정임.

□ 조치 계획

○ 상기 사항에 대하여 ‘16년도 단가계약사인 ㈜정승건설(대표 조인형)에 공사 시       행토록 작업지시하였으며, 공사 후 정산시행 예정임.

○ 공사 계획

- 공사 개요 : D100㎜ × 50m

- 예산 과목 : 자본적지출,구축물,시설비 및 부대비,시설비(간선배관공사)

별도붙임 : 공사실정보고 1부. 끝.