문서번호	조경과-12023
결재일자	2016.8.23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	도시녹화팀장	조경과장		푸른도시국장
박찬홍	김원식	이원영		08/23 최광빈
협 조

2016 서울정원박람회 전시정원 기반 조성 계획

2016. 8.

푸른도시국

(조 경 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

2016 서울정원박람회 전시정원 기반 조성 계획

2016 서울정원박람회 정원디자인 작가부 2차 워크숍을 완료하고 전시정원(공모작가, 초청작가, 수목원 등) 조성을 위한 기반 마련을 조속히 추진하기 위해 다음과 같이 보고드림.

1		정원조성개요

❍ 사 업 명 : 2016 서울정원박람회 전시정원 조성

❍ 장    소 : 월드컵공원 내 평화의공원 ‘정원예술존’

❍ 조성기간 : 2016. 8. 29. ~ 9. 30.

❍ 사업내용 : 서울우수정원디자인 16개소 작품 설치 등

(공모작가:12개소, 초청작가 1개소, 식물원·수목원: 3개소)

2		작가부 2차 워크숍 개최

□ 워크숍개요

❍ 일    시 : 2016. 8.17.(수) 14:00~17:00

❍ 장    소 : 서부공원녹지사업소(다목적홀, 정원조성 대상지)

❍ 참 석 자 : 총 24여명 (작가 등 16명, 서울정원박람회 관계자 8명)

□ 워크숍내용

❍ 작품설치 대상지내 작품의 진입방향 및 경계선 확정

❍ 대상지 기반 조성 일정 및 작품조성 일정 관련 협의

❍ 심사위원회 권고사항 전달, 정원조성 유의사항 등

3		전시정원 기반조성 개요

□ 정원대상지 기반 정비

❍ 위    치 : 평화의 공원내 정원예술존(위치도 참조)

❍ 정비기간 : 2016. 8.25. ~ 9.30.(예정)

❍ 정비내용 : 16개소 정원대상지내 작품설치(식재 등) 기반 조성 등

❍ 소요예산 : 22백만원

❍ 예산과목 : 생활주변녹지확충, 시민참여 녹지조성, 서울정원박람회, 시설비

❍ 추진방법

- 계약방법 : 수의계약

- 수의계약사유 : 금액이 소액이며, 서울정원박람회 전시정원 착공 전까지 대상지 기반 정비를 완료하기 위함.

□ 정원 급수시설 확충 정비

❍ 위    치 : 평화의 공원내 정원예술존(위치도 참조)

❍ 정비내용 : 공원내 기존 QC밸브를 활용한 급수시설 확충 정비

❍ 소요예산 : 5백만원

❍ 예산과목 : 생활주변녹지확충, 시민참여 녹지조성, 서울정원박람회, 시설비

❍ 추진방법 : 급수분배기 및 급수 호스 제작 구매

4		향후 추진 일정

❍ 2016. 8. 25. ~  9. 10. : 전시정원 조성을 위한 기반 정비

❍ 2016. 8. 29. ~  9. 30. : 전시정원 조성 설치

❍ 2016. 9. 23. ~  9. 30. : 전시정원 설치 경계 주변 기반 정비

❍ 2016.10.  3. ~ 10.  9. : 서울정원박람회 기간내 전시

❍ 2016.10.10. ~          : 정원관리계획 수립 및 존치 관리

5		행정사항

❍ 전시정원 조성 및 관리 계획 수립 ----  조경과

❍ 전시정원 대상지 기반 조성 ----------  서부공원녹지사업소(시설과)

❍ 전시정원 급수시설 확충 -------------  서부공원녹지사업소(공원운영과)

붙임 : 1. 전시정원 작품별 위치도 및 경계표시 현황사진 1부.

2. 전시정원 작가별 공정계획서 1부.  끝.