문서번호	통계데이터담당관-9011
결재일자	2016.8.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	데이터서비스팀장	빅데이터기획팀장	정보기획관
조용현	백영희	이상이	08/24 최영훈

도시통계지도 및 정책지도 고도화를 통한

디지털 시민시장실 착수보고회 결과보고

2016. 8

정보기획관

[통계데이터담당관]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

도시통계지도 및 정책지도 고도화를 통한

디지털 시민시장실 착수보고회 결과보고

『도시통계지도 및 정책지도 고도화를 통한 디지털 시민시장실 구축』

사업의 계약이 완료 됨에 따라 관련 부서와 진행상황을 공유하고 의견 수렴을 위한 착수보고회를 개최하고 결과를 보고함

Ⅰ. 사업개요

❍ 사 업 명 : 도시통계지도 및 정책지도 고도화를 통한 디지털 시민시장실 구축

❍ 사업기간 : `16. 8. 12. ~ 12. 31

❍ 사 업 자 : ㈜한국정보공학디엔에스

❍ 사 업 비 : 478,000천원

Ⅱ. 착수보고회 결과

❍ 보고일시 : 2016. 8. 19(금) 10:00 ~ 11:00

❍ 보고장소 : 서울시립미술관 B1 회의실1

❍ 참 석 자 : 28명

- 정보기획관, 공간정보담당관 외 2개팀(정보기획팀장, 공간정보기획팀장)

- 기획담당관 미래기획팀장, 총무과 통신관리팀 업무담당

- 교통정보과(TOPIS), 안전통합상황실, 서울종합방재센터 및
아리수통합정보센터 업무담당, 주관 사업자 등

Ⅲ. 보고순서

구 분	시 간	진 행
착수보고 안내	10:00 ~ 10:05	데이터서비스팀장
사업 추진계획 및 부서별 협조 사항	10:05 ~ 10:20	사업PM
질의응답	10:20 ~ 10:35	참석자
국장님 당부말씀	10:35 ~ 11:00	정보기획관

Ⅳ. 주요 의견

정보기획관 의견

❍ 시장님 또는 실국본부장 레벨에서는 현 활용 가능한 데이터(CCTV 포함)외에 통합이 안되는 데이터도 보고 싶을 것

❍ 공개범위에 있어서 시장실, 시민, 의사결정자 권한 설정과 대시민 공개는 다르므로 분리해서 보고 의도치 않은 방향으로 가지 않도록 유의

❍ 시각화 결과물의 품질을 높일 수 있도록 프로젝트 관리 할 것

❍ 데이터 중 메타데이터 수집 및 관리가 되어야 하며 정보기획관 자체에 있는 메타데이터 정제 사업과의 연관성을 검토하고 방향을 정해야 함

❍ 아카이빙 된 데이터를 디지털 시장실시장실 통합DB로 복제하는 것을 최소화 하여 현행화 문제가 적도록 설계해야 함

❍ 2016년 개발이후 사용자가 시장님에서 실국, 시민까지 확장 개방될 예정인바, 유관부서 및 시민의 다양한 의견을 청취하는 방안을 고민해 볼 것

❍ 메신저는 오픈S/W를 활용한 개발은 절대 해선 안됨, 바로톡/서울시 메신저를 활용하고 일부 알람(SMS)로 알람으로 인지하게 하는 방안을 고려해야 함

❍ BI메트릭스(상용S/W)를 도입한다고 하는데 앞으로의 유지보수 사업에 대한 의사결정 과정이 있어야 함

❍ 지표 및 UI/UX관련하여 자문위원회의 역할 및 구성, 활동일정 등에 대해 구체적인 계획을 수립하고 시장+시민의 관점에서 설계․구축되어야 하며, 자문위원회 결과가 시민의 선호도 조사등을 통해 활용될 수 있는 방안을 강구할 것

❍ 공간과와 CCTV 관련 과제는 협조 추진, 시장님은 대외적으로 자랑하고 싶어하므로 실용적인 UI/UX 설계가 필요하며 기술적 완성도가 다소 떨어진다고 해도, 디지털 시정에 대한 글로벌 리더로서의 이미지에 부합될 수 있는 신기술을 적극검토 도입하는 방안을 모색

❍ 최종의사결정을 위한 프로젝트 진행중의 보고는 시장실의 일정 및 검토범위등을 종합적으로 고려하여 재조정할 것

❍ 부서간 긴밀한 업무 협조의 필요

가. 기획담당관  : 정책 및 시정지표에 대한 최종의사 결정 유도

나. 공간정보담당관 : 위치기반정보의 활용을 위한 전문적 지식 및 데이터의 제공

다. 총무과 : 시장실에 “디지털 시민시장실” 구성을 위한 예산 및 일정등 협의

부서 의견

❍ 상황실의 영상정보 연계, 알림 및 피드백 서비스는 기술 및 보안에 대한 검토 필요함 (아리수통합정보센터, 통합안전센터)

❍ 공간정보 전문가 참여 및 정책지도 콘텐츠의 지속적 업데이트 필요, 공간정보 SDW와 연계해서 진행 (공간정보담당관)

❍ 대외적으로 잘 이용되려면 데이터의 품질이 중요한데 현행화하는 관계가 어디서부터 어디까지 인지 확인 및 협의 필요 (아리수통합정보센터)

❍ 총무과에서 시장실 설비 지원을 하는데 규격선정을 위한 정보가 필요 (총무과)

❍ 지표의 최종선정 과정은 시장님이며 상호간 역할이 필요 (기획담당관)

❍ 디지털 시민시장실 구축 이후 실국본부 확대 계획 문의 (아리수통합정보센터)

Ⅵ. 주요 이슈

이슈 사항	추진 계획(안)
1. 자문위원회 구성	자문위원 구성 계획 수립 보고(`16.9)
2. 시장님 보고일정 재검토	지표선정·설계보고 및 시범서비스 시연(2회)
3. 부서간 협조 체계	부서별 역할에 따른 수시 정보공유 및 협조확인
4. BI메트릭스(상용S/W) 도입	BI메트릭스 제품 도입 검토결과 보고(`16.8)

Ⅶ. 보고회 사진

Ⅷ. 향후일정

❍ 시정 및 도시현황 데이터 기초조사 결과 분석	: `16. 8월

❍ 데이터 수집 및 현행화 관리방안 수립	: `16. 8 ~ 9월

❍ 데이터, 콘텐츠별 권한분류 등 메타데이터 정의        : `16. 8 ~ 9월

❍ 주요지표 선정 및 통합·연계·활용 방안 수립	: `16. 8 ~ 10월

❍ 디지털 시민시장실 시스템 설계 및 개발	: `16. 9 ~ 12월

❍ 사업 완료	: `16. 12월

붙임 1. 착수보고 발표자료 1부.

2. 주요보고 일정계획표 1부.

3. 착수보고회 출석부 1부  끝.