투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	(유)한백종합건설 대표이사 귀하
(경유)
제목	부체도로 계획변경에 따른 재설계비 반영 승인

1. 한백2016-219(2016.6.23.), 한백2016-274(2016.7.20.)호와 관련입니다.

2. 신상도 지하차도 확장공사와 관련하여 당초 철거예정이었던 대광·청학빌라

일부가 존치됨에 따라 빌라 진입을 위한 부체도로 종단계획 변경 재 설계비(직접공사비

81,218천원)에 대하여 설계반영 승인통보하오니 공사업무 추진에 만전을 기하여 주시기

바랍니다.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	이석근		방재시설과장	이도헌		방재시설부장	08/24 임춘근
협조자
시행	방재시설부-13251	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 14층	/
전화	02-3708-8765	/전송	02-3708-8756	/	sttomog@seoul.go.kr	/	대시민공개