문서번호	기전과-6665
결재일자	2016.8.24.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
문준호		박심근	08/24 이종엽
협조

공사설계변경(제1회) 실정 검토보고

〈영동대교 경관조명 교체공사〉

2016. 8

성동도로사업소

기전과

영동대교 경관조명 교체공사 설계변경(제1회) 실정보고

영동대교 경관조명 교체공사 감독업무 수행중 계약물량 변동사항이 발생되어 아래와같이 설계변경을 실시코자 함

■ 공사현황

○ 공사명 : 영동대교 경관조명 교체공사

○ 공사개요

- 경관조명 철거공사 1식

- 경관조명 교체공사 1식

○ 공사기간 : 2016. 6.24 ~ 2016. 8.31

○ 공 사 비 : 91,420,200원

○ 도 급 자 : 부성전척(주) 허승구

■ 설계변경 현황

○ 주요사유

가. LED BAR 철거물량 증가

- 당초 추정물량(전기 미수전으로 확인불가)으로 설계된 철거물량이 현장 작업시 수량이 증가되어 현장실정에 맞게 조정

나. LED BAR 물량 증가

- 당초 LED BAR규격을 1m로 산정하여 등기구 수량을 산정하였으나,실제규격은 96cm로 1개당 4cm의 차이 발생으로 42개가 추가 소요되어, 자재비와 노무비 등 수량(증가) 조정 필요

○ 주요변경 내역

공종	규격	단위	수량		증 감
			변경전	변경후
LED경관조명 철거	LED BAR 15w	개	554	587	증 33

공종	규격	단위	수량		증 감
			변경전	변경후
LED경관조명 교체	LED BAR 15w	개	454	496	증 42
나트륨램프, 안정기교체	NA150W	개	10	20	증 10
전원공급기 설치	DC24V 750W 31A	개	0	13	증 13
전원공급기 설치	DC24V 500W 21A	개	22	0	감 22
케이블 설치	RF9830 3P×24AWG	m	0	60	증 60
점검대차 제작	교량용	대	1	2	증 1

○ 설계변경금액                                          (단위 : 원)

구 분		변 경 전	변 경 후	증 감	비고
도급비	공급가액	83,109,273	93,960,000	증10,850,727
	부 가 세	8,310,927	9,396,000	증1,085,073
	사급자재비	0	11,755,000	증11,755,000
	합 계	91,420,200	115,111,000	증23,690,800

■ 예산과목

안전총괄본부/도로시설과, 도로시설물관리, 기전시설물관리, 한강교량 및 도로시설물 경관조명 유지보수, 시설비

■ 향후계획

주요 변경내역에 의거 집행잔액 및 낙찰차액 사용하여 설계변경 시행후 공사 진행코자 함.

첨부 : 1. 설계변경 내역서(갑, 을) 1부.

2. 제비율검증표 1부.

3. 설계변경 검토서 1부. 끝.