문서번호	방재시설부-13286
결재일자	2016.8.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		환경시설과장	방재시설부장
조양연		조성만	08/24 임춘근
협조

『중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업』

공사 설계변경(11차1회) 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 8.24.

도시기반시설본부

(방재시설부)

『중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업』

공사 설계변경(11차1회) 검토보고

『중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업』 추진중에 하수도과학관 전시계획 현실화에 대한 총괄전시계획가(M/P)의 수당 확보 방침【물재생시설과-8627호,2016.6.20】호에 따라 11차 계약금액을 조정 수당 확보키 위한 설계변경 검토 보고임.

※ 관련근거 : 한국종합2016-08-299호(2016.8.16)

사업개요

❍ 위    치 : 서울시 성동구 자동차시장3길 64(송정동, 중랑물재생센터내)

❍ 규    모 : 고도처리 88만톤/일, 시설현대화 25만톤/일, 용수공급 20만톤/일 등

❍ 사업기간 : 2009. 2. 13 ∼2017. 4. 28

❍ 감리/시공 : ㈜한국종합기술 외 1개사 / GS건설(주) 외 3개사

❍ 총사업비 : 344,268백만원(도급비 335,283백만원)

관련근거

❍  입찰안내서7.4 공사계약일반조건 21조②, ④, ⑥, ⑦항

❍  건설사업관리 업무지침서 제93조 (설계변경관리)

감리 검토내용

❍ 제11차 1회 계약금액 조정내역                           단위 : 원

구 분	당 초	변 경	증 감	비 고
도급내역	43,947,000,000	43,930,000,000	감17,000,000
- 변경내용 : 토목공사 자재대 감액 (GRP관 D2400 X 6M 1본, D2000 X 45’ 1EA)

❍ 시설현대화 하수도과학관 전시안 현실화에 대한 총괄전시계획가(M/P) 수당확보 방침【물재생시설과-8627호,2016.6.20】호에 따른 2016년 사업비중 시설비 11차 계약금액을 조정하여 시설부대비로 사용토록 설계변경

감리 검토의견

❍ 11차 1회 설계변경은 시설현대화 하수도과학관 전시안 현실화에 대한 총괄전시계획가(M/P) 수당확보를 위하여 시설비 11차 계약금액을 조정 필요

❍ 건설사업관리 업무지침서 제93조(설계변경관리)에 근거하여 시공자로부터 설계변경등으로 인한 계약금액조정을 위한 각종 서류를 제출받아 검토, 확인 결과 설계변경 사유 및 공사비 산출이 적정함으로 계약금액을 조정하고져 함.

조치 의견

❍ 중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업 『제11차1회 설계변경』건은 감리 검토의견대로 조정함이 타당하다고 사료되며,

❍ 이에 11차1회 설계변경(43,947백만원→43,930백만원, 감17백만원)에 따라 계약금액을 변경하여 공사관리에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 책임감리 검토의견서 1부.  끝.