문서번호	총무과-4616
결재일자	2014.2.19.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설관리팀장	총무과장
이관호		최석기	02/19 오형철
협조
	별관운영팀장		배창호

2013년도 청사 전기설비 유지보수공사(연간단가)  설계변경(3차) 검토 보고

2014. 2.

총 무 과

2013년도 청사 전기설비 유지보수공사(연간단가)

설계변경(3차) 검토 보고

2013년 청사 전기설비 유지보수공사(연간단가) 시행 중 당초 계약된 내역에서 물량 증․감과 국민 및 연금보험료 사후 정산으로 인한 변경사항이 발생되어 설계변경(정산)을 시행하고자 보고 드립니다.

□ 공사개요

❍ 공 사 명 : 2013년 청사 전기설비 유지보수공사

❍ 공사기간 : 2013. 3. 4 ~ 2014. 2. 28

❍ 계약금액 : 214,632천원

❍ 계 약 자 : ㈜대건이엔씨  대표  이황희

❍ 계약내용 : 전기 및 소방설비 유지보수 416개 공종

□ 검토내용

❍ 변경사유

- 본 공사는 시청사 전기설비 유지보수와 사무실 재배치에 따른 시설 개·보수 전기공사를 시행하기 위해 총 416개 공종을 연간단가계약으로 체결한 공사로써,

- 공사시행 중 시공물량 증․감과 건강 및 연금보험의 사후 정산에 따른 설계변경이 필요 함.

❍ 설계변경(정산) 내용(붙임:1)

- 후생동 1층 에어컨실외기 전원 연결공사외 9건

· 정산금액 : 26,389천원

에어컨실외기 분전함 설치	초소 옥내배선	탕비실 음수대 전원공급

❍ 변경(정산)금액 : 금 214,500천원, 감)132천원

구 분		당 초 금 액	변 경 금 액	증․감	비고
총 공 사 비		214,632,000원	214,500,000원	감) 132,000
도급비	공 급 가 액	195,120,000원	195,000,000원	감) 120,000
	부가가치세	19,512,000원	19,500,000원	감) 12,000
	합 계	214,632,000원	214,500,000원	감 )132,000

❍ 기성준공 현황

계약금액(원)	전회까지 기성금액(원)	금회 정산금액 (원)	잔여금액(원)	비고
214,632,000	188,111,000	26,389,000	132,000

❍ 관련규정 검토

- 설계변경으로 인한 계약금액 조정(지방자치단체공사계약일반조건.Ⅶ)

․ 물량증․감 : 계약단가 적용

․ 신규비목 : 설계변경 당시를 기준으로 산정한 단가와 동 단가에 낙찰율(87.746%)을 곱한 금액의 범위안에서 협의 결정

- 국민건강 및 연금보험의 사후 정산

․ 지방자치단체입찰및계약집행기준(행정안전부예규 제404호,‘12.3.22)제1장 제8절에 따른「보험료 사후정산」

□ 조치의견

❍ 상기와 같이 계약금액 변경 후 준공(정산)처리 하고자 합니다.

- 2013년도 사업 -------  준공예정 : 2. 21(금)

※ 2014년도 계약예정 : ㈜거산(성북구 종암동), 174,363천원

붙임 : 작업완료 현황 및 설계변경 내역서 각 1부.  끝.