문서번호	방재시설부-13270
결재일자	2016.8.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		환경시설과장	방재시설부장
조양연		조성만	08/24 임춘근
협조

『서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업 전면채임감리용역』

총괄11회 및 8차1회 설계변경 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 8.24.

도시기반시설본부

(방재시설부)

『『서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업 전면채임감리용역』

총괄11회 및 8차1회 설계변경 검토 보고

「서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업 전면책임감리용역」수행중에 감리단으로부터 제출된 설계변경 총괄11회 및 8차1회에 대한 검토 보고임.

사업개요

❍ 용 역 명 : 서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업 전면채임감리용역

❍ 위    치 : 서울시 강서구 마곡동 91번지(서남물재생센터내)

❍ 사업개요 : 고도처리시설개량 127만톤/일, 시설현대화 36만톤/일

❍ 용역기간 : 2009. 11. 30 ∼ 2016. 08. 31

❍ 시 공 사 : ㈜도화엔지니어링외 1개사

❍ 도 급 비 : 11,104백만원

보고 내용

❍ 총괄11회 및 8차1회 설계변경

구 분		당 초	변 경	증ㆍ감	비 고
총괄 11회	전체	11,104,400천원 (`09.11.30∼`17.05.31)	11,446,300천원 (`09.11.30∼`17.05.31)	증)341,900원
8차 1회	전체	1,317,000천원 (`16.02.06∼`17.04.30)	1,317,000천원 (`16.02.06∼`17.04.15)	변경없음 (감15일)	투입 기간 조정
	서남	1,176,000천원 (`16.02.06∼`17.02.05)	1,176,000천원 (`16.02.06∼`17.01.26)	변경없음 (감11일)
	마곡	140,300천원 (`16.11.01∼`17.04.30)	140,300천원 (`16.11.01∼`17.04.15)	변경없음 (감15일)

❍ 관련근거

- 방재시설부-11463호(2016.0721) 업무지시전 : 제4회 물가변동(ESC)으로 인한 계약금액조정 승인

- 도시기반시설본부-16-3958호(2016.05.19) 감리원 축소근무 요청

❍ 설계변경 사유

-『서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업』감리용역 수행중 제4회 물가변동으로 인한 계약 금액이 증액됨에 따라 총괄11회 설계변경으로제4회 물가변동(ESC) 증액분을 반영하고,

- 8차 용역기간중 원도급사인 대림산업과 하도급사인 우원개발의 분쟁 기간중 감리원 축소근무기간 만큼 상주보조 감리원 투입기간을 조정하여 8차1회 설계 변경코자 함.

조치 의견

❍ 총괄11회 변경은 제4회 물가변동으로 인한 계약금액 증가분(증341,900천원)를 반영하여 설계변경코자하며,

○ 8차1회 변경은 제4회 물가변동으로 인한 계약금액 증액분과 상주보조감리원 투입기간을 조정 반영하여 계약 금액 변경없이 감리용역설계변경을 시행코져 함.

붙임 : 1) 책임감리원 검토 의견서 1부.

2) 설계변경(총괄11회 및 8차1회) 내역서 1부.  끝.