문서번호	설비부-13298
결재일자	2016.8.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시책사업과장	설비부장
김원태		임현근	08/24 권오식
협조

『서울시어린이병원 삼성발달센터증축 전기 및 통신공사』

1차공사 준공기한연기(2회) 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 08.

서울특별시도시기반시설본부

(설비부)

『서울시어린이병원 삼성발달센터증축 전기 및 통신공사』

1차공사 준공기한연기(2회) 검토보고

「서울시어린이병원 삼성발달센터증축 전기 및 통신공사」의 1차공사 준공기한을 연기하고자(2회) 아래와 같이 보고드림

Ⅰ. 관련근거

□ 서도기-전-121(2016.08.19) : 전기공사 1차분 공사기간 연기요청(2회) 보고

□ 서도기-통-122(2016.08.19) : 통신공사 1차분 공사기간 연기요청(2회) 보고

Ⅱ. 공사개요

□ 공 사 명 : 서울시어린이병원 삼성발달센터증축 전기·통신공사

□ 공사규모 : 지하2층/지상5층 연면적11,950㎡ 전기·통신설비 1식

□ 공사기간 : 2015.04.27～2017.02.19 (1차공사 준공일 : 2016.06.30)

□ 도 급 비 : 전기-1,137,826,000원, 통신-457,779,340원

□ 시 공 사 : 전기-길흥전기(주), 통신-유복전기(주)

□ 감 리 사 : (주)영화키스톤

Ⅲ. 검토내용

□ 연기사유 : 선행공정 지연 및 공기연장

∙ 전기, 통신 1차공사의 공종이 지하2층~지상5층 건축구조물 매입배관·배선이나 선행공정(건축)이 8월 현재 지상3층 바닥공사 및 지하1층 바닥공사중에 있어 전기 및 통신공사를 공사기간 내 시행할 수 없음.

∙ 건축 2차공사에서 계획공정 중 구조물공정이 2016.10~11월로 변경된 상황임

□ 준공기한 연기 검토내용

공 종	차 수	도급비(원) (변경없음)	준공기한		비 고
			당 초	변 경
전기공사	총차	1,137,826,000	2017.02.19	2017.02.19	변경없음
	1차	250,000,000	2016.08.31	2016.10.31	61일연기
통신공사	총차	457,779,340	2017.02.19	2017.02.19	변경없음
	1차	50,000,000	2016.08.31	2016.10.31	61일연기

□ 연기사유 귀책소재 : 서울특별시 도시기반시설본부

□ 지체상금 부과여부 : 미부과

Ⅳ. 조치 의견

∙책임건설사업관리단의견과 같이 선행공정 지연 및 공정계획변경에 따라 전기 및 통신공사의 1차공사분을 선행공정(건축)에 맞춰 2016.10.31까지(61일간) 연기코자 함.

따로붙임 1. 준공기한 연기요청공문 각  1부.

2. 전기·통신분야 예정공정표 및 연기합의서 각 1부.   끝.