투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(실정보고(시설현대화 토공사 수량 변경) 승인 )

1.업무지시현장 :  서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업 대림산업(주), 서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업 주식회사 도화엔지니어링

2.작 성 일 자 : 2016-08-24 15:08:35

3.지 시 내 용:               1. 도화(서남)2016-248호(2016.8.17.)와 관련입니다.

2. 서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업과 관련하여 소화조 구간 공법변경과 지반 지층 변화로 인한 토공사(터파기 및 되메우기) 계획변경에 대해서는 감리단 검토의견대로 전체 계약금액 변경이 없이 승인하오니 후속조치등에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 감리단 실정보고 문서 1부.   끝.

끝.

- 본 결재는 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는

문서로, 결재 완료 시 One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송

처리 됩니다.

- 업무지시전 내용 수정을 원하는 경우 One-PMIS로 반송

후 One-PMIS에서 재작성을 해주시기 바랍니다.

주무관							조양연			환경시설과장					전결 08/24 조성만
협조자
시행			방재시설부-13284									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 14층															/
전화		0237088783						/전송			0237088756					/	choaral@seoul.go.kr												/	대시민공개