투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	준공기한 연기의뢰(서울시어린이병원-전기,통신 1차공사)

우리부에서 시행중인『서울시어린이병원 삼성발달센터증축 전기 및 통신 1차공사』에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 공사개요

- 공 사 명 : 서울시어린이병원 삼성발달센터증축 전기 및 통신공사

- 공사기간 : 2015.04.27~2017.02.19

- 계약금액 : 전기-금1,137,826,000원, 통신-금457,779,340원

2. 준공기한 연기내용

공 사 명	계 약 자	공 사 기 간			비 고
		차수	당 초	변 경
전기공사	길흥전기(주) 대표 이소순	총차	2015.04.27~2017.02.19	2015.04.27~2017.02.19	변경없음
		1차	2015.04.27~2016.08.31	2015.04.27~2016.10.31	61일연기
통신공사	유복전기(주) 대표 유정식	총차	2015.04.20~2017.02.19	2015.04.20~2017.02.19	변경없음
		1차	2015.04.20~2016.08.31	2015.04.20~2016.10.31	61일연기

※ 도급비는 변경없음

3. 연기사유 : 선행공정(건축) 지연으로 준공기한 연기

4. 연기사유 귀책소재 : 서울특별시 도시기반시설본부

5. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임 1. 준공기한 연기 검토보고 1부.

2. 연기 합의각서(전기,통신) 각 1부.   끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장),건설총괄부장
주무관	김원태		시책사업과장	임현근		설비부장	08/24 권오식
협조자
시행	설비부-13326	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화		/전송		/		/	대시민공개