문서번호	청소행정과-18657
결재일자	2016.8.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		청소작업팀장		청소행정과장		주민생활국장
조대환		김용섭		代임순홍		08/25 소판수
협조
	재무과장		김성철
	계약팀장		김종수

★ ◉

2016년도 공공처리시설

반입불가 폐기물 위탁용역 설계변경 계획

청소행정과

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 ☑ 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 □ 공약(약속)사업 □ 계속사업 ☑ 인센티브/공모사업 □
소통분야 고려사항		●	구민		:		유 □ ( ) 무 □
		●	전문가		:		유 □ ( ) 무 □
		●	이해당사자		:		유 □ ( ) 무 □
기타 고려사항		일 자 리 □ 환경영향 □ 안 전 □ 유지비용 □ 바른 공공언어 □
		성 인 지 □ 취약계층 □ 장 애 인 □ 디 자 인 □ 갈등발생 요인 □
타자원 활용		●	중앙부처	:		유 □ ( ) 무 □
		●	서울시	:		유 □ ( ) 무 □
		●	기업	:		유 □ ( ) 무 □
		●	민간단체	:		유 □( ) 무 □
언론홍보 계획		기획보도 □ 보도자료 □ SDTV □ 성동뉴스레터 □ 성동구소식지 □
		기 고 문 □ 전자행정서비스 □ S N S □ 기타 (리플릿 등) □ 없 음 □
	● 홍 보 제 목 :
	● 중점 홍보사항 - -
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

2016년도 공공처리시설

반입불가 폐기물 위탁용역 설계변경 계획

2016년도 공공처리시설 반입불가 및 잔재폐기물 위탁용역에 대하여 아래와

같이 계약 설계변경을 시행코자 합니다.

계약개요

계약건명: 2016년도 공공처리시설 반입불가 폐기물 처리 위탁용역

계약업체: (주)거성리사이클링(대표자 권길식)

계약기간: 2016. 6. 24 ~ 2016. 12. 31.

계약금액: 금73,400,000원

예산과목: 청소행정과, 청소관리, 자원재활용 및 폐기물처리, 폐기물 처리,

민간이전, 민간위탁금

설계변경 내역

위탁물량 변경

구 분	변경전	변경후	비 고
위탁물량(예상)	700톤	150톤	550톤 감소
톤당 단가	104,857원	104,857원	변경없음

계약금액 변경

(단위: 원)

구 분		당초금액	변경금액	감액금액
도급 금액	계약금액	73,400,000	15,728,550	57,671,450
	부가세	면세	면세
	계

예산현황

(단위: 원)

예산액	원계약금액	낙찰차액	비 고
74,900,000	73,400,000	-1,500,000

설계변경 사유

당초 처리예상 물량보다 폐기물 처리량 감소로 계약 축소

- 기 계약업체인 (주)거성리사이클링은 재활용 중간처리 업체로

우리구에서 발생하는 반입불가 및 잔재폐기물 중 일부의 처리가    불가함에 따라 새롭게 소각처리 업체를 선정하여 병행하여 처리    하고 있는바, 당초 처리예상 물량보다 폐기물량이 감소

※ 【계약 과업내역서: 운송 및 처리조건】

연간 단가계약의 처리물량은 예정량이며, 처리물량이 예정량 보다 적을          경우에는 입고 총량으로, 처리물량 초과시에는 쌍방의 합의 하에 처리한다.

행정사항

설계변경  ----- 재무과

붙임   산출내역서 1부.  끝.