문서번호	서울숲공원관리사무소-4587
결재일자	2016.8.25.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	운영팀장	서울숲공원관리사무소장		동부공원녹지사업소장
송영탁	김흥창	윤학수		08/25 이춘희
협 조
	주무관		이전호

『2016년 서울숲공원 질서유지 관리용역』

변경계약(2차)추진계획

2016. 8.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

『2016년 서울숲공원 질서유지 관리용역』

변경계약(2차) 추진계획

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

서울숲공원이 2016년 10월로 민간위탁이 예정됨에 따라, 기존 「2016년 서울숲공원 질서유지 관리용역」의 용역기간을 변경(연장) 시행하여 공원내 질서유지 및 시설물 보호업무 추진에 만전을 기하고자 함

1		계약(용역)현황	7

❍ 계약(용역)건명 : 2016년 서울숲공원 질서유지 관리용역

❍ 계약(용역)기간 : 2016. 1. 1 ~ 2016. 8. 31(8개월)

❍ 계약(용역)금액 : 금233,352,670원

❍ 계    약    자 :*************

❍ 계약(용역)내용 : 공원내 질서유지 및 시설물보호 순찰 등

【 1차 변경계약 내용 】

※ 계약(용역)기간 연장 및 계약금액 증액

구 분	당 초	변 경	비 고
계약기간	‘16.1.1 ~ 6.30(6개월)	‘16.1.1 ~ 8.31(8개월)	2개월 연장
계약금액	175,014,500원	233,352,670원	58,338,170원 증액

2		변경계약 사유	7

❍ 서울숲공원 민간위탁 일정 변경(민간위탁 개시일 연기)

-「2016년 서울숲 질서유지 관리용역」의 1차 변경계약시에는 ‘16. 8월로 민간위탁이 예정되었으나, 수탁기관 모집결과 2회 유찰되어 ’16. 10월로 민간위탁이 연기됨에 따라, 현 용역기간으로는 공원질서 유지 및 시설물 보호업무 추진에 약 2개월의 공백 발생

- 공원관리업무의 연속성 확보 및 민간위탁시 원활한 인계․인수를 위해 용역기간 연장 필요

3		변 경 내 용	7

❍ 변경사항 : 계약(용역)기간 연장 및 계약금액 증액

구 분	당 초	변 경	비 고
계약기간	‘16.1.1 ~ 8.31(8개월)	‘16.1.1 ~ 10.31(10개월)	2개월 연장
계약금액	233,352,670원	291,294,180원	57,941,510원 증액

❍ 계약기간 연장에 따른 설계 추가내역(붙임「설계 변경(추가) 내역서」참조)

- 근무인원 : 1일 기준 10명(주간 3, 야간 4, 심야 3)

근무기간	근무시간	연근무인원(명)	주간(명)	야간(명)	심야(명)
‘16.9.1~10.31	07:00~익일 07:00	610	183	244	183

- 설계 금액

구 분	9월	10월	비 고
총 용역비	28,495,820	29,445,690
공급가액	25,905,290	26,768,810
부가가치세	2,590,530	2,676,880

❍ 예산과목

- 동부공원녹지사업소 공원운영과, 공원녹지관리 수준향상 및 도시녹화지원, 공원관리 및 도시녹화 지원, 서울숲공원 운영 및 보수, 공공운영

4		향후추진계획	7

❍ ‘16. 8월 중 : 변경계약 의뢰 및 체결

❍ 향후 민간위탁 추진 일정 변경시 추가 변경계약 또는 입찰 추진

붙 임 : 설계 변경(추가) 내역서 1부