문서번호	설비부-13356
결재일자	2016.8.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
신정규		김창균	전결 08/25 권오식
협조

『도심권 50+캠퍼스 및 복지타운조성 통신공사』

관급자재 납품기한 연기 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 08.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『도심권 50+캠퍼스 및 복지타운조성 통신공사』

관급자재 납품기한 연기 검토 보고

『도심권 50+캠퍼스 및 복지타운조성 통신공사』와 관련 책임건설사업관리 기술자로부터 통신공사의 관급자재 납품기한 연기요청이 있어 검토 보고 드림.

근    거

○ PC도통 16-151(2016.8.24.)호 관급자재 납품기한 연기검토보고

보고내용

○ 관급자재 계약 현황(도심권 50+캠퍼스 통신공사)

품 명	계 약 자	납품기한		납품금액	계약번호
		당 초	변 경
통합배선 1차	엔제이시스템	‘16.8.31.	‘16.11.14.	52,383,740	12152270600
통합배선 2차		‘16.9.30.		124,388,490	12162009700
전관방송 및 AV설비 1차	아이엠피	‘16.8.31.		86,408,300	12152259000
전관방송 및 AV설비 2차		‘16.9.30.		253,491,700	12162009800
네트워크 스위치	나이츠넷	‘16.9.30.		26,400,000	121582056200
방화벽	아이티윈	‘16.9.30.		29,800,000	121582056300

○ 납품기한 연기사유 : 납품시기 미도래

○ 귀책사유 : 도시기반시설본부

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

○ 계약금액 : 변경없음

○ 책임건설사업관리기술자 의견

- 도심권 50+캠퍼스 및 복지타운조성 통신공사 중 관급자재의 납품시기가

현장여건상 미도래되어 납품기한 연기조치 필요

조치의견

○ 책임건설사업관리기술자의 의견이 적정한 것으로 판단되며 원활한 사업추진을 위하여 도심권 50+캠퍼스 및 복지타운조성 통신공사 관급자재 납품기한을 연기코자 함.

행정사항

○ 건설총괄부에 납품기한 연기 의뢰

붙임.  감리기술검토서(관급자재 납품연기) 1부.   끝.