문서번호	시설과-6255
결재일자	2016.8.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설과장
김영수	김경수	08/25 김재균
협 조

『남산공원 발생폐기물 처리용역(합성수지,목재류)』

설계변경시행 보고

2016. 08

시  설  과

『남산공원 발생폐기물 처리용역』

설계변경시행 보고

『남산공원 발생폐기물 처리용역(합성수지,목재류)』시행과 관련하여 현장여건 및 시공물량의 증.감 발생에 따라 설계변경을 시행하고자 보고드림

Ⅰ		용역개요

용 역 명 : 남산공원 발생폐기물 처리용역(합성수지, 목재류)

용역개요 : 폐합성수지 30톤, 폐목재류 5대(5ton)

용역기간 : 2016.07.20. ~ 2016.08.31

계약금액 : 10,972,500원

도 급 자 : 유림환경  대 표 : 윤 건 수

Ⅱ		설계변경 내용

설계변경 내역

구 분		당 초	변 경	증. 감	비고
공 사 비		10,972,500	12,069,000	증)1,096,500
도급비	공급가액	9,975,000	10,971,818	증) 996,818
	부 가 세	997,500	1,097,182	증) 99,682

예산과목 : 남산및산하공원 시설물보수정비사업, 남산및산하공원

시설물보수정비, 시설비

설계변경사유

폐기물 보관장소(구,상업은행단지)내 반출량 변경

낙산공원 배드민턴장 관리동 철거로 인한 물량 변경

구 분	당초	변경	증 . 감	비고
폐합성수지	30톤	45톤	증) 15톤
폐 목 재 류	8대(5ton)	5대(5ton)	감) 3대(5ton)

Ⅲ		행정사항

『설계변경 내용』과 관련하여 현장여건 및 추가 발생량에 따른

반출량 변동사항에 대하여 설계변경 및 정산시행에 반영하고자 함

붙 임 : 변경설계서 1부. 끝.