투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	변경계약체결- 2016년 상반기 관공선 수리 용역

1. 수상안전과-3848(2016.8.8.)호와 관련입니다.

2. 「2016년 상반기 관공선 수리 용역」건에 대하여 다음과 같이 변경계약을 체결하고자 합니다.

가. 계약현황

용 역 명	2016년 상반기 관공선 수리 용역
계약상대자	태항조선㈜ (대표 : 유용수)
계 약 금 액	금180,745,000원(금일억팔천칠십사만오천원)
계 약 일 자	2016.06.29.
용 역 기 간	2016.07.01. ~ 2016.08.20.

나. 변경내역 : 금액 변경(증19,899,400원)

(단위 : 원)

변 경 내 역	변경전	변경후
금 액 변 경	180,745,000	200,644,400

다. 변경사유 : 검사관 지적사항 발생으로 선체외판 및 선저변 커버 등 교체

붙     임 : 1. 용역변경계약서 1부.

2. 계약의뢰 1부.

3. 변경계약보증서 1부.

4. 용역계약 조건 및 관련 예규 1부.  끝.

주무관	주홍열		총무과장	박병현		총무부장	08/25 이상국
협조자
시행	총무과-14862	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 (성수동1가)	/
전화	02-3780-0723	/전송	02-3780-0740	/		/	부분공개(5)