투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	수상안전과장
(경유)
제목	변경계약체결 통보 - 2016년 상반기 관공선 수리 용역

1. 수상안전과-3392(2016.7.19.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 아래와 같이 변경계약이 체결되었음을 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 계약현황

용 역 명	2016년 상반기 관공선 수리 용역
계약상대자	태항조선(주) (대표 : 유용수)
계 약 금 액	금180,745,000원(금일억팔천칠십사만오천원)
계 약 일 자	2016.06.29.
용 역 기 간	2016.07.01. ~ 2016.07.25.

나. 변경내역 : 용역기간 변경(2016.07.01. ~ 2016.08.20.)

변 경 내 역	변경전	변경후
공 사 기 간	2016.07.01. ~ 2016.07.25.	2016.07.01. ~ 2016.08.20.

다. 변경사유 : 공사기간중 계속되는 장마와 상가 장소 변경으로 인한 지연

붙     임 : 1. 용역변경계약서 1부.

2. 변경계약보증서 1부.  끝.

	총무부장
주무관	주홍열		총무과장	박병현		총무부장	08/25 이상국
협조자
시행	총무과-14861	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 (성수동1가)	/
전화	02-3780-0723	/전송	02-3780-0740	/		/	부분공개(5)