서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	용역 계약변경(과업기간 연장) 의뢰

1. 건축기획과–18040(2016.8.25.)호와 관련입니다.

2. 우리 부서에서 추진중인 “소규모 굴착 건축공사 안전관리 매뉴얼 작성용역”에 대하여 아래와 같이 계약변경을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

- 다     음  -

가. 계약건명 :소규모 굴착 건축공사 안전관리 매뉴얼 작성용역

나. 계약번호 : 20160*******00

다. 계약기간

- 당 초 : 2016.6.29.~2016.8.28

- 변 경 : 2016.6.29.~2016.10.28

라. 계약금액 : 7,100천원

마. 계 약 자 : ㈜다산이엔지 이상헌

바. 계약변경 사유

- 자문회의와 자치구 및 전문가 심의위원의 의견을 수합하면서 검토기간 지연과 추가 반영사항이 발생함에 따라 과업기간을 연장

붙임 1. 계약변경 방침서 1부.

2. 계약변경(과업기간 변경) 의뢰서 1부.

3. 계약변경 합의서 1부.(별송). 끝

	건축기획과장
주무관	최홍규		건축관리팀장	박중섭		건축기획과장	08/25 한병용
협조자
시행	건축기획과-18056	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110	/
전화	02)2133-7112	/전송	02)2133-0750	/	fromk@seoul.go.kr	/	부분공개(5)