문서번호	시설관리과-17654
결재일자	2016.8.26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
정재필		代이문성	08/26 장종욱
협조

『2016년 수유1동외 8개동상수도공사-1차변경』

설계변경 심의 위원회 개최결과 보고

2016. 08

시설관리과

『2016년 수유1동외 8개동 상수도공사-1차변경』

설계변경 심의 위원회 개최결과 보고

우리사업소에서 시행중인『2016년 수유1동외 8개동 상수도공사(장기계속단가계약)』에 대하여 신규공종 및 시공물량 중․감 사항이 발생됨에 따라 설계변경에 앞서 심의 위원회를 개최하여 설계변경내용을 심의 완료 후 그 결과를 보고함

1. 일 반 현 황

가. 공 사 명 : 2016년 수유1동외 8개동 상수도공사(장기계속단가계약)

나. 공사개요

당  초 :  D=13∼300㎜,   L=1,563m

변  경 :  D=13∼300㎜,   L=2,000m

다. 공사기간 : 2016. 04. 18. ~ 2017. 06. 30.

라. 도 급 비

당  초 : 금566,433,500원(금오억육천육백사십삼만삼천오백원)

변  경 : 금566,433,500원(금오억육천육백사십삼만삼천오백원)

마. 도 급 자 : ***************

2. 설계변경 사유

○ 신규공종 발생 및 시공물량 증․감에 따른 변경

- 신규공종 : 부단수할정자관 부설 및 접합공(80mm)외 3개 공종

○ 주요공종 세부 변경내역 : 따로붙임(설계변경 내역서)

3. 심의위원회 개최

가. 심의일정 : 2016년 08월 26일(금)  11:00

나. 심의장소 : 북부수도사업소 시설관리과

다. 심의위원 : 위원장(시설6급 박미영)

위  원(시설6급 이문성, 시설7급 박상권, 시설7급 장병철)

4. 심 의 내 용

○ 2016년 수유1동외 8개동 상수도공사(장기계속단가계약) 설계변경 심의

- 수량변동 및 단가적용의 적정성 여부

- 계약변동 (증·감)수량 단가 낙찰률 적용범위내 적용 적정여부 등

- 제경비 적정산정 및 적용의 적정성 여부 등

5. 설계변경 금액 내역

구 분	당초(원)	변경(원)	증·감(원)	비 고
총공사비	876,433,500	876,433,500	없음
도급비	566,433,500	566,433,500	없음
관급비	160,000,000	160,000,000	없음
복구비 및 기타	150,000,000	150,000,000	없음

6. 행 정 사 항

가. 설계변경의 타당성 : 타당함

나. 신규공종 발생유무 및 단가적용 타당성 : 타당함

다. 제잡비 적정 산정 및 적용 적정성 : 적정

라. 계약변동(증,감)물량 계약단가 낙착율 적정 적용여부 : 적정

마. 각종 제반 규정 준수여부 : 준수

바. 관련규정의 불명확한 내용에 대한 검토 : 적합

붙 임 : 1. 설계변경 사유서 1부

2. 설계변경 심의 신청서 1부.

3. 설계변경 내역서 1부.

4. 설계변경 심의 결과서 1부.  끝.