투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신자	관리단속과장
(경유)
제 목	관급자재 납품기한 연기 요청

우리 사업소에서 시행중에 있는 「2016년 교통사고 잦은 곳 개선」에 소요되는 관급자재의 납품기한을 아래와 같이 연기하고자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

◦ 요청 사항

연번	계약건명	계약번호	품 명	단위	수 량	납품기한		변경 사유	비고
						당초	변경
1	물품(차선분리대) 조달 구매	00158178200	차선분리대	경간	60	8.30	9.30	설치위치변경 및 중앙차선 확보지연
		00158178200	차선분리대	경간	40

끝.

	도로보수과장
주무관	이기영		도로보수과장	08/26 이상호
협조자
시행	도로보수과-4075	(		)	접수		(		)
우	04807	서울특별시 성동구 자동차시장길 41	/
전화	2210-1538	/전송	2210-1549	/		/	대시민공개