투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	변경계약(2차) 의뢰[2013년 폐아스콘 운반 및 처리용역(연간단가)]

관내 특별시도 포장정비공사에서 발생한 폐아스콘을 운반 및 처리하는 용역에 대하여 설계변경코자하니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 2013년 폐아스콘 운반 및 처리용역(연간단가)

나. 도 급 자 : ㈜해솔산업개발 대표 유길문, ㈜동녘 대표 신종훈

다. 변경내용

1) 준공기한 : 2014. 2. 28.(변동없음)

2) 도 급 비 : 당초 금556,512,000원 → 변경 금554,048,000원(감 금2,464,000원)

라. 변경사유 : 공종별 물량 증·감

첨  부 : 1. 설계변경방침서 1부

2. 합의각서 1부.  끝

	서울특별시 성동도로사업소장
주무관	최영서		도로보수과장	02/20 국중진
협조자
시행	도로보수과-793	(		)	접수		(		)
우	133-851	서울 성동구 용답동 250	/
전화	2210-1533	/전송	2210-1549	/	9373@seoul.go.kr	/	대시민공개