투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	변경계약 요청

1. 재무과-20(‘16.1.4)호 및 서울숲관리공원사무소-4587(’16.8.25)호와 관련입니다.

2. 서울숲공원 민간위탁 일정이 지연됨에 따라, 우리공원에서 시행중인 「2016년 서울숲공원 질서유지 관리용역」에 대하여 계약(용역)기간 연장 등 아래와 같이 계약 변경을 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

아  래 -

가. 계약(용역)건명 : 2016년 서울숲공원 질서유지 관리용역

나. 계약(용역)기간 : ‘16. 1. 1 ~ 8. 31(8개월)

다. 계약(용역)금액 : 금233,352,670원

라. 계    약    자 :**************

마. 변  경  내  용

구 분	당 초	변 경	비 고
계약기간	‘16.1.1 ~ 8.31(8개월)	‘16.1.1 ~ 10.31(10개월)	2개월 연장
계약금액	233,352,670원	291,294,180원	57,941,510원 증액

바. 변  경  사  유 : 서울숲공원 민간위탁 일정 변경(민간위탁 개시일 연기)

붙임 : 1.「2016년 서울숲공원 질서유지 관리용역」변경계약 추진계획 1부.

2. 설계변경내역서 1부.

3. 합의각서 1부(원본 별도 송부). 끝.

	서울숲공원관리사무소장
★주무관	송영탁		운영팀장	김흥창		서울숲공원관리사무소장	08/26 윤학수
협조자
시행	서울숲공원관리사무소-4612	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 뚝섬로 273	/
전화		/전송	02)460-2930	/		/	부분공개(6)