서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	준공기한 연기 의뢰(삼양로 확장 외 1개소 타당성조사 용역)

우리과에서 시행 중인「삼양로 확장 외 1개소 타당성조사 용역」에 대하여 다음과 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 삼양로 확장 외 1개소 타당성조사 용역

나. 계 약 자 : ㈜서우티이씨

다. 준공기한 : 당초  2016. 08. 29. → 변경  2016. 10. 29.

라. 귀책소재 : 서울특별시

마. 연기사유

- 미아재정비촉진계획과 연계된 현실적 확장방안 등에 대하여 검토 중이며, 이에 따른 유관기관(성북구, 강북구)과 도로확장 방안에 대한 협의가 불가피함에 따라 준공기한 연기 필요

붙 임 : 1. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

2. 준공기한 연기 방침서 1부.

3. 합의각서 1부. 끝.

	도로계획과장
주무관	정재훈		도로시설계획팀장	국중진		도로계획과장	08/26 하종현
협조자
시행	도로계획과-12188	(		)	접수		(		)
우			/
전화	2133-8089	/전송	2133-0763	/	1007jjh@seoul.go.kr	/	대시민공개