함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	재무회계과장
(경유)
제 목	계약사항 변경(납품기한) 요청

1. 기전설비과-7394(2016.8.26.)호와 관련입니다.

2. 우리 부에서 추진중인 ‘자양취수장 천장크레인 및 호이스트 제작구매설치’건의 계약기간을 변경하고자 하오니 아래와 같이 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 계 약 명 : 자양취수장 천장크레인 및 호이스트 제작구매설치

나. 계약번호 : 제2016064951700호

다. 계약대상 : 부경이엔지(대표 : 정수정)

라. 변경사항 : 계약기간 변경

1) 당초 : 2016.06.27. ~ 2016.09.01.

2) 변경 : 2016.06.27. ~ 2016.10.31.(증 60일)

마. 변경사유 : 해당 사업의 작업공간이 펌프 및 밸브설치 공사 작업공간과                                 중첩되어 납품일을 연기함.

바. 귀책사유 : 우리 본부

붙임  1. 연기 보고서        1부.

2. 합의서(부경이엔지) 1부.  끝.

	기전설비과장
주무관	이상록		기전설비과장	08/26 代오준식
협조자
시행	기전설비과-7398	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	3146-1335	/전송	3146-1319	/	rock1975@seoul.go.kr	/	대시민공개