문서번호	기전과-8508
결재일자	2016.8.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		기전과장
민성준		08/26 이영목
협 조

『2016년 교통신호기 신설 및 개량공사(통합) 제2차 작업지시』

실정보고 검토 및 조치계획 보고

2016. 8

북부도로사업소

기 전 과

『2016년 교통신호기 신설 및 개량공사(통합) 제2차 작업지시』

실정보고 검토 및 조치계획 보고

2016년 교통신호기 신설 및 개량공사(연간-통합) 제2차 작업 추진 중 책임감리사(건영이앤씨)로부터 현장상황에 따른 실정보고서가 접수되어 이를 검토하고 조치계획을 보고함

□ 관련 근거

○ 2016. 8. 12. 제2차 작업지시[2016년 교통신호기 신설 및 개량공사(통합)]

○ 2016. 8. 24. 제2차 작업지시 실정보고서 제출(건영이앤씨)

□ 공사 개요

○ 공 사 명 : 2016년 교통신호기 신설 및 개량공사(연간단가-통합)

○ 공사기간 : 2016. 3. 14. ~ 2016. 12. 31.

○ 시공업체 : 한국전기개발공사 대표 이승호

○ 공사금액 : 금438,773,370원

□ 제2차 작업지시 내용

○ 작업기간 : 2016. 8. 12. ~ 2016. 9. 1.

○ 작업대상 : 도봉구 세반쇼핑 및 (연동)1 외 4개소

○ 작업금액 : 금203,786천원

□ 감리사 현장실정보고 내용 및 검토의견            (단위 : 원)

연번	교차로명	현황 및 문제점	감리사 검토의견	비고 (개략)
1	세반쇼핑 및 연동 1	당초 제어기 맨홀을 1개 교체하는 것으로 설계	현장확인 결과, 맨홀 상태가 양호하여 재사용	감 17,187
		현장에 사용하지 않는 노후 맨홀이 존재	철거
		가공 신호케이블이 6선인데 조가선을 분리설치하는 것이 당초 설계에 미반영	가공 신호케이블이 5선 이상일 경우, 조가선을 분리 설치해야함에 따라 조가선, 애자 및 밴드 설치 물량 증가
2	세반쇼핑 연동2	당초 신호케이블 철거가 18m로 설계	현장확인 결과, 철거해야할 물량이 증가	증 1,907,447
		당초 전원선 철거 및 신설이 29m로 설계	현장확인 결과, 전원선 연결지점이 도면의 거리보다 멀어서 물량 증가
		가공 신호케이블이 6선인데 조가선을 분리설치하는 것이 당초 설계에 미반영	가공 신호케이블이 5선 이상일 경우, 조가선을 분리 설치해야함에 따라 조가선 설치 물량 증가
3	상원중 및 연동	당초 설계에 가로등 철거량이 누락	가로등 철거 물량 증가	증 49,333
4	건강보험료 연금보험료 노인요양보험료	추후 최종 설계변경시 정산 예정	설계금액을 감액 후 증빙자료에 의한 최종 설계변경시 정산	감 6,360,034
5	산업안전 보건비	추후 최종 설계변경시 정산예정	설계금액을 감액 후 증빙자료에 의한 최종 설계변경시 정산	감 2,236,515
6	전기안전수수료 음향신호기 기능검사비	각종 수수료 발생	증빙자료에 의한 최종 설계변경시 반영	-
7	간접비 (제경비, 일반관리비, 이윤 등)	상기 항목에 의한 금액변동으로 간접비 차액 발생	간접비 정산	감 955,044
합 계			감 7,612,000

□ 작업지시 변경금액

(단위:원)

구분	변경 전	변경 후	증 ․ 감	비고
공급가액	185,260,000	178,340,000	6,920,000(감)
부가가치세	18,526,000	17,834,000	692,000(감)
합 계	203,786,000	196,174,000	7,612,000(감)

□ 보고자 의견

○ 책임감리사(건영이앤씨)로부터 접수된 실정보고에 대해 검토한 결과 현장여건에 맞게 변경했다고 판단하여 위와 같이 시공하도록 승인하고자 함

붙 임 :  제2차 작업지시 실정보고(감리사) 1부.  끝.